투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	2020년 한강공원 진출입시설 유지보수 공사(연간단가)

1. 기반시설과-3131호(2020.8.31.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(제1차)을 시행하고 변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

나. 계약기간 : 2020. 3. 9. ~ 2020. 11. 30.

다. 계약금액 : 금305,290,000원

라. 도 급 자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

바. 변경내용 : 신규공종 추가 및 물량 증·감으로 인한 계약금액 변경

구 분		당초	변경	증·감
총공사비		306,370,000	350,000,000	증) 43,630,000
도급비	공급가액	277,536,364	318,181,819	증) 40,645,455
	부가가치세	27,753,636	31,818,181	증) 4,064,545
	소계	305,290,000	350,000,000	증) 44,710,000
이전비		1,080,000	-	감) 1,080,000

사. 변경사유 : 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

아. 예산과목

- 한강공원관리및운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원기전시설유지관리, 시설비

금액:44,710,000원(낙찰차액 43,630,000원, 이전비 1,080,000원).

※ 낙찰차액 사용 (방침 기반시설과-960호, 2020. 3. 20.)

붙 임  1. 설계변경(제1차) 시행 보고서 1부

2. 변경내역서 1부. 끝.

주무관							양정훈			기반시설과장					09/01 라철흠
협조자
시행			기반시설과-3163									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)															/
전화		3780-0677						/전송			02-3780-0744					/	seed22@seoul.go.kr												/	대시민공개