문서번호	도시재생과-5572
결재일자	2020.9.1.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		재생시설팀장		도시재생과장		스마트포용도시국장
정현경		김정현		김영규		09/01 홍명안
협조
	도시계획과장		이호진
	광고물관리팀장		김부수
	재생정책팀장		차소연

★ ◉

송정동(광나루로11길) 경관개선사업 추진계획 변경

2020.  9.

도 시 재 생 과

송정동(광나루로11길) 경관개선사업 추진계획 변경

광나루로11길 경관개선사업 관련하여 용역입찰공고 결과 무응찰 및 자격요건 불충분으로 유찰되어(총 6회) 사업 추진이 지연되고 있어, 원활한 사업 추진을 위하여 사업추진계획(입찰참가자격)을 변경하고자 함

□ 추진근거

○ 서울시 2020~2021 경관사업 대상지선정(市 도시관리과-6951, ’19.06.26.)

○ 송정동(광나루로11길) 경관사업 추진계획(도시재생과-3895, ’19.07.19.)

○ 송정동(광나루로11길) 경관사업 추진계획 변경(도시재생과-3524, ’20.06.08.)

□ 사업개요

○ 위    치: 광나루로11길(송정동 중심상업가로)

○ 규    모: 면적 약 5,000㎡(L=500m, W=10m)

○ 사 업 비: 1,000백만 원(시비 500, 구비 500)

- 설계용역비(실시설계 포함): 100백만 원(시비 50, 구비 50)

- 공사비: 900백만 원(시비 450, 구비 450)

○ 사업내용: 광나루11길 지역상권활성화를 위한 상업가로 미관개선

□ 추진경과

○ 2019. 4.  서울시 2020년 도시경관개선사업 공모(市 도시관리과)

○ 2019. 6.  서울시 2020년 도시경관개선사업 공모 선정

○ 2019. 7.   광나루로11길 경관사업 추진계획 수립

○ 2020. 3.  입찰공고 및 재입찰공고(1,2차)

○ 2020. 3.  경관개선사업 실무회의 1차(교통행정과, 성동경찰서)

○ 2020. 4.  입찰공고(3차)

○ 2020. 5.  재입찰공고(4차)

○ 2020. 5.  경관개선사업 실무회의 2차(교통 및 디자인분야 전문가)

○ 2020. 6.  성동 마을건축가 자문회의

○ 2020. 6.  광나루로11길 경관사업 추진계획 변경

○ 2020. 7.  입찰공고 및 재입찰공고(5,6차)

□ 현황(문제점) 및 대책

○ 입찰 참여업체 저조로 사업추진 지연

☞ 입찰참가자격을 과업수행 가능한 범위 내 조정(추가)하여 다양한 업체 입찰 등록 가능하도록 조정

○ 입찰참가자격 조정

- 변경전

①「건축사법」제23조 규정에 의하여 건축사업무신고를 한 건축사사무소

②「산업디자인진흥법」제9조 규정에 의한 산업디자인전문회사(환경디자인분야) 또는 종합디자인분야 전문회사(환경디자인 포함)로 등록한 업체

- 변경후

①「건축사법」제23조 규정에 의하여 건축사업무신고를 한 건축사사무소 또는「엔지니어링산업진흥법」제21조 규정에 의하여 건설부문(도로·공항, 도시계획, 조경 중 한가지)의 엔지니어링사업자 신고를 한 업체

②「산업디자인진흥법」제9조 규정에 의한 산업디자인전문회사(환경디자인분야) 또는 종합디자인분야 전문회사(환경디자인 포함)로 등록한 업체

□ 향후계획

○ ’20. 9.	입찰공고
○ ’20. 9.	제안서평가위원회 개최 및 계약시행
○ ’20. 10.	착수보고회 개최
○ ’20.10.~’21.5.	상업가로 미관개선을 위한 설계용역
○ ’21.6.~’21.12.	상업가로 미관개선 사업시행

□ 행정사항

○ 간판개선사업 추진 협조:  도시계획과

- ’20.10.~12.	간판개선 디자인 검토 및 건축물입면개선사항 협의
- ’21. 1.~ 3.	점포주와 간판디자인 협의
- ’21. 4.~ 5.	간판디자인 최종협의 및 옥외광고물심의위원회 심의
- ’21. 6.~12.	간판개선 및 상업가로 미관개선 사업 공사 시행. 끝.