문서번호	공원운영과-11333
결재일자	2020.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	녹지조경팀장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
김은희	고봉채	최석환	09/02 남길순
협 조

서울정원박람회존치정원 정비공사

준 공 기 한 연 장  검 토 보 고

2020.   9.

서부공원녹지사업소

(공원운영과)

서울정원박람회존치정원 정비공사

준 공 기 한 연 장  검 토 보 고

서울정원박람회존치정원 정비공사 추진 관련 공사품질 확보를 위한 공사기간 연장계획을 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명: 서울정원박람회존치정원 정비공사

○ 기    간: ’20. 08. 10. ~ 09. 03.

○ 내    용: 노후정원 27개소 노후시설 보수, 도색 등

○ 공 사 비: 22,230,000원

○ 시 공 사: 강남조경건설(주) 대표 김운희

□ 준공기한연장 개요

○ 사    유: 장마 및 8호 태풍 바비로 인한 우천으로 지연일수 발생

○ 연장기간: 12일

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	’20. 08. 10.~09. 03.	’20. 08. 10.~09. 15.	12일 연장

□ 조치의견

○ 기상여건으로 인한 지연일수 발생으로 절대공기 부족을 감안하여 도급 공사기간을 연장하고자 함

귀책소재: 서부공원녹지사업소

지체상금: 미부과.  끝.