문서번호	설비부-13028
결재일자	2020.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장
유영선	오삼록	09/02 이달영

『청계천로 자전거 전용도로 구축』

교통신호기공사 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

도시기반시설본부

[설 비 부]

- 청계천로 자전거전용도로 구축 -

교통신호기공사 발주계획 보고

우리 본부에서 추진 중인「청계천로 자전거 전용도로 구축」관련 교통신호기공사 발주계획에 대하여 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ		추진근거

○ 청계천로 자전거전용도로 구축을 위한 전기공사 내역서 및 설계도서 수정 송부

- 자전거정책과-9391(2020.08.31.)호

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 청계천로 자전거전용도로 구축 교통신호기공사

○ 공사위치 : 청계광장 ~ 고산자교, 5.94㎞, 왕복 11.88㎞

○ 공사내용 : 신호등지주 이설, 교통신호등 교체

○ 공사기간 : 2020.08. ~ 2021. 03.

○ 위치도 및 조감도

*

Ⅲ		추진경위

○ 2019.10.16.	: 청계천로 도심순환형 자전거 간선도로망 구추계획 수립

○ 2020.03.27.	: 청계천시민위원회 자문(하천관리과)

○ 2020.04.16.	: 청계천시민위원회 자문 결과(하천관리과 회신)

- 사업의 필요성 공감하며 찬성이나, 보행데크 설치 시 신중한 검토가 필요하다는 의견

○ 2020.04.29.	: 투자심사 개최(보행데크 제거 의견)

○ 2020.04.29 : 시장 현안보고(도시교통실)

- 청계천로 상징성을 고려하여 보행데크 설치를 제외한 구상변경 보고

○ 2020.05.20 : 청계천로, 한강대로 자전거도로 주민설명회 개최 계획

- 코로나19 관련 소규모 주민설명회 추진

○ 2020.05.22 : 투자심사 결과 알림(재정관리담당관)

- 결과 : 적정, 조건부(보행데크 제거, 보행자에 대한 안전대책 마련)

○ 2020.08.31. : 전기공사 내역서 및 설계도서 수정 송부

Ⅳ		소요예산

(단위 : 천원)

***	****	***	***	***	***
***	*******	*******	*	*****

○ 예산과목

- 조직) 자전거정책과, 정책) 자전거이용 활성화 및 교통환경개선, 단위) 자전거 이용시설 확충 및 관리, 세부) 도심연계 자전거 전용도로망 구축, 통계목) 시설비

Ⅴ		발주계획

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한)

- 제한경쟁 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조

○ 입찰 참가자격

- 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록업체로서 입찰공고일전일부터 계약체결까지 법인등기부상 본점이 서울시에 소재한 업체

○ 낙찰자 결정방법 : 시설공사 적격심사

- 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행자부 예규)에 의함

○ 현장설명 : 미실시

- 지방계약법 시행령 제15조 제3항의 단서규정에 의해 생략

Ⅵ		향후계획

○ 2020. 09.   : 공사발주

○ 2020. 10.   : 공사계약 및 착공

○ 2021. 03.   : 공사준공(예정)