문서번호	기전과-4925
결재일자	2020.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	09/02 변봉섭
협 조
	주무관			조소현

신림2교 미디어글라스 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 9

남부도로사업소

(기  전  과)

신림2교 미디어글라스 설치계획

도심속에서 문화, 축제 등 여유와 낭만을 즐길 수 있으며, 시민들의 삶의 질 향상과 자긍심을 고취시킬 수 있도록 신림2교에 미디어글라스 설치 추진코자 함.

1		추진 개요

□ 추진근거

○ 신림2교 보수공사관련 용역성과품 송부( 관악구 도로관리과 2020.8.12)

- (미디어글라스설치 예산) 용역 성과품(전기, 시설, 콘테츠 제작비)

○ 신림2교 보수공사 추진계획 보고(교량안전과 2020. 8.12)

- (공사추진 주체 ) 시설보수(시설보수과), 미디어글라스 설치(기전과)

- (공사완료 후 관리 주체) 관악구

□ 사업개요

○ 위      치 : 관악구 신림2교(관리주체 : 남부도로사업소 시설보수과)

○ 공사내용 : 미디어글라스 설치, 콘텐츠 제작, 전기공사

○ 사업기간 : ‘20. 8. ~ ‘20. 12.

○ 사 업 비 : 764백만원

신림2교
위 치 도	전경사진

2		사업 추진계획

□ 추진내용

○ 미디어 글라스 설치(시설)

○ 미디어 글라스 전기공사

○ 미디어글라스 콘텐츠 제작

□ 사업 세부 추진계획

1. 미디어 글라스 설치

○ 사 업 명 : 신림2교 미디어글라스 설치

○ 사업개요

- 난간철거  : 기존 난간 철거 – 50.3M

- 구조 포스트 설치  : 하부 브라켓 및 T-BAR TYPE – 50.3M

- G-GLASS 설치 : 관급자재 – 65.4M2

- A.L SHEET 마감 설치 : 마감판 설치 – 56.1M2

- 실리콘 마감 : (구조 및 웨더) – 706M

○ 사업기간 : 2020. 9 ~ 12(90일)

○ 소요예산 : ***************************************

○ 공사 계약방법 : 제한경쟁(지역)

- 건설산업기본법에의한 금속구조물·창호·온실공사업 등록한 업체로 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

○ 관급자재 구매 : 조달구매(특정기술 선정심사위원회 심의제품 구매)

- 특정기술 선정심사위원회 심의결과 보고(관악구 도로관리과-9999, ’20.6.8.)

○ 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 신림2교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

2. 전기공사

○ 사 업 명 : 신림2교 미디어글라스설치 전기공사

○ 사업개요

- 인입선공사 1식

- 분전반 설치 1식

- 전기 및 통신 배선공사 : 2차 전기공사

○ 사업기간 : 2020. 9 ~ 12(60일)

○ 소요예산 : *********

○ 계약방법 : 전자공개수의계약

- 전기공사업법에 의한 전기공사업면허 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된 영업소의 소재지가 서울특별시에 소재한 업체

○ 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 신림2교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

3. 콘텐츠 제작

○ 사 업 명 : 미디어글라스 콘텐츠 제작용역

○ 콘텐츠 제작 주제 : 신림2교 교량을 아름답게 표현할 수 있는 주제 선정

○ 콘텐츠 수: 24편

○ 콘텐츠 제작내용(안)

[홍보 콘텐츠] 서울특별시에서 제공하는 주요 행정정보 콘텐츠 전시

[재난안내 콘텐츠] 서울시에서 제공하는 재난정보 콘텐츠 전시

[미디어 아트] 미디어 아트 콘텐츠 전시

[시즌 콘텐츠] 기념일에 해당하는 콘텐츠 전시

- 콘텐츠 작품의 선정범위는 협의하여 진행

○ 사업기간 : 2020. 9 ~ 12

○ 소요예산 : *********

○ 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호 마목(여성기업)

○ 계약업체 : ********

○ 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 신림2교 보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비

3		향후계획

□ 추진일정

○ 2020.  9.02.	추진계획 수립

○ 2020.  9.03.	계약심사 요청(기전과⇒계약심사과)

○ 2020.  9.10.	미디어글라스 설치 공사발주

○ 2020. 12.20.	준공.

□ 행정사항

○ 공사 완료후 유지관리 부서인 관악구에 시설물 인수인계.

○ 홍보콘텐츠 제작시 유지관리 부서인 관악구와 협의 후 진행.

붙임 : 1. 미디어글라스 설치추진관련 공문 1부.

2. 미디어글라스 설치 공사 도서 1부.

3. 미디어글라스설치 전기공사 도서 1부.

4. 미디어글라스 콘텐츠 제작도서 1부.  끝.