문서번호	정수시설과-2808
결재일자	2020.9.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
임근식		백상희	09/02 代최진경
협 조
	주무관			류혜영
	주무관			김금옥

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

[구내 노출배관 도장공사]

설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

강북아리수정수센터

[구내 노출배관 도장공사]

설계변경 시행 보고

구내 노출배관 도장공사가 완료되어 감에 따라 아래와 같이 설계변경 및 정산하고 준공처리코자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 공 사 명 : 구내 노출배관 도장공사

◯ 공사 개요

- 역세척관 및 공기배관 : 890㎡ STS316L 파우더 코팅

- 역세펌프, 모터 : 61㎡ 에폭시 코팅

◯ 공사 기간 : 2020. 4. 13. ~ 2020. 9. 9.

◯ 계약 금액 : ************

◯ 계약 상대자 : *************

Ⅱ		설계변경 사항

□ 주요 변경 내역

◯ 준공 물량 변경

- 1계열 Φ350 역세배관(강관) 27㎡ 도장 추가(기 실정보고

정수시설과-1597, 2020. 5. 25)

공종	수량	단위	재료비		노무비		합계
			단가	금액	단가	금액
STS316 L 코팅	27	㎡	115,195	3,110,265	190,352	5,139,504	8,249,769

금액 증8,249,769원

- 중앙 역세 배관 중 착오로 포함된 스텐레스강관 Φ250, 27㎡   STS316L 파우더 코팅 제외

공종	수량	단위	재료비		노무비		합계
			단가	금액	단가	금액
STS316 L 코팅	27	㎡	115,195	3,110,265	135,590	3,660,930	6,771,195

금액 감6,771,195원

◯ 변경 내역

연번	변경사항	당초	변경	증․감
○ 물량 반영
1	STS316L 파우더 코팅 물량 증감 반영	271,525,207	273,003,781	증)1,478,574
○ 제경비 감액
2	간접노무비, 산재보험료, 고용보험료, 산업안전관리비 기타경비 요율에 맞게 적용	38,372,471	38,516,430	증)143,959
3	건강보험료, 연금보험료, 노인장기보험료 퇴직공제부금 자료 제출치 않아 감액	17,665,803	0	감)17,665,803
4	일반관리비, 이윤 요율에 맞게 적용	16,031,974	15,029,789	감)1,002,185
계				감)17,045,455

□ 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	102,907,484	102,907,484	-
	노무비	182,107,140	183,704,000	증)1,596,860
	경 비	42,548,857	24,908,727	감)17,640,130
	소 계	327,563,481	311,520,211	감)16,043,281
일반관리비		6,551,269	6,230,404	감)320,865
이 윤		9,480,705	8,799,385	감)681,320
공급가액		343,595,455	326,550,000	감)17,045,455
부가세		34,359,545	32,655,000	감)1,704,545
총공사비		377,955,000	359,205,000	감)18,750,000

□ 총괄변경 내용

○ 계약금액 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	343,595,455	326,550,000	감)17,045,455
부가가치세	34,359,545	32,655,000	감)1,704,545
총공사비	377,955,000	359,205,000	감)18,750,000

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자  하며, 심의결과에 따라 설계변경, 재계약, 준공 처리코자 함.

붙   임 : 1. 설계변경내역서(안)  1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서(기술심사담당관)  1부.

3. 산업안전관리비 검토 결과서  1부.

4. 보험료 완납 증명서  1부.

5. 도장공사 실정보고  1부.  끝.