투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울정원박람회존치정원 정비공사 준공기한 연기 시행

공원운영과-11333(2020. 9. 2.)호와 관련 서울정원박람회존치정원 정비공사 준공기한을 아래와 같이 연장하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 서울정원박람회존치정원 정비공사

2. 계 약 자 : 강남조경건설㈜*******

서울 강동구 올림픽로48길 31-25(T: 02-471-9721)

3. 계약금액 : 금22,230,000원(금이천이백이십삼만원)

4. 공사기간 : ’20. 08. 10.~’20. 09. 03.

5. 계약변경 사항

구 분	당 초	변 경	증 감
공사기간	’20. 08. 10.~’20. 09. 03.	’20. 08. 10.~’20. 09. 15.	12일 연장

- 연기사유귀책소재: 서부공원녹지사업소

- 지체상금 미부과여부: 미부과

6. 공기연장사유 : 장마 및 제8호태풍 바비로 인한 우천으로 공사지연일수 발생

7. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인환경생태테마공원육성, 산하공원운영, 월드컵공원시설물보수정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 검토보고서 1부.

2. 연기의뢰서 1부.  끝.

주무관	김은희		녹지조경팀장	고봉채		공원운영과장	최석환		서부공원녹지사업소장	09/02 남길순
협조자	재무팀장	김극남
시행	공원운영과-11346	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	02-300-5544	/전송	02-300-5527	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개