설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

1. 공사명 : 구내 노출배관 도장공사

신청부서명	정수시설과
작 성 자	임근식
제출년월일	2020. 5. 11

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2020. 9. 2(화) 13:30

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아                    래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

정수시설과장

백상희

09/02

백상희

타당함

위    원

주무관

마동훈

마동훈

타당함

위    원

주무관

김영수

김영수

타당함

위    원

주무관

엄주원

엄주원

타당함

위    원

주무관

이승현

이승현

타당함

담    당

주무관

임근식

임근식

타당함

설계변경 사유서

□ 공사개요

◯ 공 사 명 : 구내 노출배관 도장공사

◯ 공사 개요

- 역세척관 및 공기배관 : 890㎡ STS316L 파우더 코팅

- 역세펌프, 모터 : 61㎡ 에폭시 코팅

◯ 공사 기간 : 2020. 4. 13. ~ 2020. 9. 9.

◯ 계약 금액 : ************

◯ 계약 상대자 : *************

□ 설계변경 내용 및 사유

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조 2항         및 공사계약 일반조건 제7절 나항

◯ 주요 변경 내역

1. 준공 물량 변경

- 1계열 Φ350 역세배관(강관) 27㎡ 도장 추가(기 실정보고

정수시설과-1597, 2020. 5. 25)

공종	수량	단위	재료비		노무비		합계
			단가	금액	단가	금액
STS316 L 코팅	27	㎡	115,195	3,110,265	190,352	5,139,504	8,249,769

· 금액 : 증8,249,769원

- 중앙 역세 배관 중 착오로 포함된 스텐레스강관 Φ250, 27㎡

STS316L 파우더 코팅 제외

공종	수량	단위	재료비		노무비		합계
			단가	금액	단가	금액
STS316 L 코팅	27	㎡	115,195	3,110,265	135,590	3,660,930	6,771,195

· 금액 : 감6,771,195원

※ 물량변동 동일, 금액차이 사유 : 스텐레스는 바탕만들기 제외

2. 변경 내역

연번	변경사항	당초	변경	증․감
○ 물량 반영
1	STS316L 파우더 코팅 물량 증감 반영	271,525,207	273,003,781	증)1,478,574
○ 제경비 감액
2	간접노무비, 산재보험료, 고용보험료, 산업안전관리비 기타경비 요율에 맞게 적용	38,372,471	38,516,430	증)143,959
3	건강보험료, 연금보험료, 노인장기보험료 퇴직공제부금 자료 제출치 않아 감액	17,665,803	0	감)17,665,803
4	일반관리비, 이윤 요율에 맞게 적용	16,031,974	15,029,789	감)1,002,185
계				감)17,045,455

3. 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	102,907,484	102,907,484	-
	노무비	182,107,140	183,704,000	증)1,596,860
	경 비	42,548,857	24,908,727	감)17,640,130
	소 계	327,563,481	311,520,211	감)16,043,281
일반관리비		6,551,269	6,230,404	감)320,865
이 윤		9,480,705	8,799,385	감)681,320
공급가액		343,595,455	326,550,000	감)17,045,455
부가세		34,359,545	32,655,000	감)1,704,545
총공사비		377,955,000	359,205,000	감)18,750,000

◯ 총괄변경 내용

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	343,595,455	326,550,000	감)17,045,455
부가가치세	34,359,545	32,655,000	감)1,704,545
총공사비	377,955,000	359,205,000	감)18,750,000

□ 심 의 사 항

○ 물량 증∙감 적정성 여부

○ 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부 등

붙 임 : 1. 설계변경 내역서  1부.

2. 설계변경 시행 보고  1부.  끝.