문서번호	치수과-13951
결재일자	2020.9.2.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김형대		代문철		민병기		09/02 손경철
협조

★ ◉

「장터길 9 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)」 준공기한 연기 검토 보고

2020. 9.

(안전건설교통국 치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 □ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 물재생계획과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

「장터길 9 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)」

준공기한 연기 검토 보고

우리구에서 시행중인 『장터길 9 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)』과 관련하여 장마기간 우천으로 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기하고자 합니다.

□ 관련근거

❍ ㈜건양엔지니어링 건양(성동)제20-25호(2020. 8.31.)

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 장터길 9 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)

❍ 위    치: 장터길 9 ~ 장터길 42-2

❍ 기    간: 2020. 3.12. ~ 9. 7.

❍ 규    모: ▣1.3m×3.0m~2@2.5m×2.0m, L=359m

단면보수 2,648㎡, 철근노출 단면보수 111㎡

❍ 도 급 비: 994,862,700원

❍ 시 공 사: 유한회사 성지 대표 김은영

❍ 건설사업관리단: ㈜건양엔지니어링 대표 김종문

□ 준공기한 연기 사유

❍ 장마기간 지속적인 강우로 하수사각형거 내 공사가 불가하여 절대공기가 부족한 실정임

- 최근 2개월(6월~8월) 강우일수: 37일

□ 조치계획

❍ 아래와 같이 준공기한을 연기하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함

- 당초: 2020. 9. 7. ⇒ 변경: 2020. 10. 7.

- 준공기한 연기 귀책 소재: 성동구청

- 지체상금 부과 여부: 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 관련공문 1부.  끝.