문서번호	총무과-9157
결재일자	2020.8.28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
신현성		代한문희	08/28 박태주
협조

「서울시립미술관 리모델링 」

타당성용역 변경 시행계획(안)

2020.08.

서울시립미술관

(총무과)

「서울시립미술관 리모델링 」

타당성용역 변경 시행계획(안)

○ 서울시립미술관 리모델링 타당성용역 진행 중 착수보고에서 제시된      내진보강 및 야외공간 조성등에 따른 용역변경 계약 시행을 보고 드림

□ 추진근거

○ 서울시립미술관 타당성용역 시행  총무과-9082(2020.8.24.)호

○ 서울시립미술관 타당성용역 착수보고

○ 서울시립미술관 리모델링 타당성 용역 추가 과업 의견 (에이디엠2020-0814)호

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 서울시립미술관 타당성용역

○ 용 역기간: 2020.5.15.~ 10.16

○ 용 역 비 : 48,750천원

○ 용역시행자 : ****************

○ 변경 내용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
용역기간	2020.5.15.~10.16	2020.5.15.~10.16	변경 사항 없음
***	******** ******************	********	***********

○ 추가 예정 공사비                                  (단위 : 천원)

구 분	공 사 비	상세내용	비 고
야외시설물	5,000,000	휴게시설, 조경시설 등

□ 추진경위

○ ‘20. 5.13. : 리모델링 타당성 용역 시행 방침 수립

○ ‘20. 5.15. : 타당성용역 계약

○ ‘20. 7.24. : 용역 착수 보고

□ 용역 변경  검토

구 분	검토 내용	비 고
용역기간	변 동 없 음	-
*****	************************* ***********************************************	******************** **

***************************************

**************************************

************************************

*******************************************

□ 향후계획

○ 2020. 10. 16.일 : 타당성 용역 준공

첨부  1. 설계용역 과업내용서 1부.

2. 설계용역비 산출서 변경전 변경후 각 1부.

3. 제758차 기술용역 타당성 심사 내용.

4. 서울시립미술관 리모델링 타당성 용역 추가 과업 의견  (용역시행자).  끝.