문서번호	교통정보과-12973
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도로정보팀장	교통정보과장
김진구		최종선	08/31 이수진
협조

『서울 C-ITS 실증사업 사업관리용역』관련

총차 계약변경 및 장기3차 시행 계획

2020. 8

교통정보과

『서울 C-ITS 실증사업 사업관리용역』관련

총차 계약변경 및 장기3차 시행 계획

올인원단말기 원가산정용역을 반영하여 총차 계약을 변경하고, 장기2차 계약 준공에 따라 장기3차 계약을 시행하고자 함

□ 추진근거

○ 자동차·도로교통 분야 ITS 사업시행지침 제14조

(국토교통부고시 제2015-739호, 2015.10.07.)

○ 한국건설기술연구원 미래융합연구본부-11789호(2020.08.31.)

“서울 C-ITS 실증사업 사업관리용역 총차 계약 변경 관련 자료 체출”

□ 총차 계약개요

○ 계약건명 : 서울 C-ITS 실증사업 사업관리용역

***************************

○ 계약기간 : 2018.04.13.~2021.02.12

○ 계약상대자 : 한국건설기술연구원, 한국교통연구원

□ 총차 계약변경 계획

○ 변경사유 : 올인원단말기 원가산정용역 결과 반영

－ ㈜티머니와 체결한 “서울 C-ITS 실증사업 관련 물품공급 및 기술지원, 유지관리 협약 제5조”에 따라 한국물가협회에서 시행한 원가조사결과 반영

**********************************

******************************************************

□ 장기3차 계약 시행 계획

********************************

- 총차 계약금액에서 장기1차 및 장기2차 준공금액을 제외한 잔여금액

○ 계약기간 : 2020.08.26.~2021.02.12.

* 사업관리대상인 본 사업 계약과 동일한 일자 지정을 위해 소급 적용

○ 주요 과업내용

- 정확한 효과 검증을 위한 사전․사후 평가 계획 수립 및 지도․감독

- 확정설계 등 설계 관리 및 지도․감독

- 시공 관리를 위한 감리자(업체) 선정 및 감독

- 성능 및 준공 평가, 품질관리 업무 수행

- 시험운영 계획 수립 및 최종 운영 평가

- 사업발주 및 사업자 선정 지원

- 계약변경 등 계약관리 및 지도․감독

□ 조치계획

○ 서울 C-ITS 실증사업 사업관리용역 장기3차 계약 의뢰

□ 향후일정

○ ’20. 8. 31 : 계약 의뢰(⇨ 계약상대자, 재무과)

◆  붙  임 : 1. 사업관리단 공문 1부.

2. 총차 계약내역서 1부.

2. 장기3차 계약내역서 1부. 끝.