문서번호	기반시설과-3131
결재일자	2020.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		라철흠	08/31 전영주
협 조

『2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사 (연간단가)』 설계변경(1차) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

『2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)』

설계변경(1차) 보고

「2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)」의 설계변경(1차)을 시행하여 원할한 공사 추진

1		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 한강공원 진·출입시설 유지보수 공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 3. 9 ~ 2019. 11. 30

○ 계약금액 : 305,290천원

○ 계약상대자 : 단야공영㈜ 대표 김은숙

○ 공사규모

- 진·출입시설 보수 : 데크보수 300㎡, 조류방지망 설치 300㎡, 철재면 재도장 160㎡, 오일스텐재도장 800㎡

- 피아노물길 보수 : 석재판 철거 후 재설치 85㎡

2		설계변경 사항

○ 변경 사유 : 민원처리 및 공사현장 여건 등에 따른 신규공종 및 물량 증·감 사항 반영

○ 신규비목(가드레일 설치 외 51건) 협의율 93.372% 적용

- 관련근거 : 지방계약법 시행령 제74조 및 공사계약일반조건 제20조

· 신규비목의 단가는 설계단가와 그 단가에 낙찰률을 곱한 금액의 범위에서 계약당사자 간에 협의하여 결정

· 계약당사자 간에 협의가 이루어지지 않는 경우

⇒ [설계단가 + (설계단가 × 낙찰률)] × 50/100

- 신규비목에 대하여 설계단가 적용 요청(계약상대자 → 한강사업본부)

- 신규비목에 대하여 계약상대자와 발주청 간 이견으로 협의율(93.372%) 적용

⇒ [설계단가(100%) + 낙찰률(86.745%)] × 50/100 = 93.372%

○ 주요공종 수량 변경내역

공 종		단위	당초	변경	증·감
수량 변경	데크보수	㎡	300	118	감) 182
	오일스텐칠	㎡	800	1,610	증) 810
	조류방지시설	㎡	300	483	증) 183
	철재면 재도장	㎡	160	130	감) 30
	피아노물길 석재판 보수	㎡	85	15	감) 70
신규 공종	가드레일 정비	경간	-	150	증) 150
	보행자 계단 철거 설치	m	-	32	증) 32
	과속방지턱 설치	EA	-	18	증) 18
	승강기상부 통풍창 교체	EA	-	12	증) 12

○ 직접공사비 변경 내역                                (단위:원)

공 종	수량	단위	재 료 비	노 무 비	경 비	합 계	:증,감
1. 한강공원 진입시설	1	식	60,875,501	82,507,803	16,135,803	159,519,107	증)	14,871,521
	1		36,464,465	108,868,803	31,087,360	174,390,628
2. 피아노물길	1	식	525,198	11,284,421	934,417	12,744,036	감)	10,569,345
	1		87,461	1,922,559	164,671	2,174,691
3. 기타 부대공	1	식	458,213	5,001,603	1,831,471	7,291,288	증)	25,180,850
	1		25,190,510	4,122,134	3,159,494	32,472,138
4. 폐기물 처리	1	식			1,793,034	1,793,034	감:	605,283
	1				1,187,751	1,187,751

○ 총공사비 증·감 현황                                  (단위:원)

구 분		당초	변경	증·감
총공사비		306,370,000	35,000,000	증) 43,630,000
도급비	공급가액	277,536,364	318,181,819	증) 40,645,455
	부가가치세	27,753,636	31,818,181	증) 4,064,545
	소계	305,290,000	350,000,000	증) 44,710,000
이전비		1,080,000	-	감) 1,080,000

○ 예산조치

- 증액된 공사비 44,710천원에 대하여 43,630천원의 낙찰차액 및 이전비 1,080천원을 사용하여 우선 공사추진하고 설계변경 시행하고자 함

- 예산과목

· 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원접근시설유지관리, 시설비(300백만원)

· 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리및개선, 한강공원기전시설유지관리, 시설비(50백만원) : 낙찰차액 43,630천원 및 이전비 1080천원 사용

3		조치계획

○ 상기와 같이 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 1. 설계변경 내역서(1차) 1부

2. 설계변경 자문위원회 심의결과 1부

3. 낙찰차액사용 방침(해빙기 안전점검 결과 보고) 1부.  끝.