문서번호	한옥건축자산과-8668
결재일자	2020.8.31.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	건축자산지원팀장	한옥건축자산과장
김현우	최장길	08/31 신동권
협 조

공공한옥(계동 2-39) 설계용역

준공기한 연기 검토보고

2020. 8.

도시재생실

(한옥건축자산과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

공공한옥(계동 2-39) 설계용역 준공기한 연기 검토보고

SH공사 대행사업 중인 공공한옥(계동 2-39) 증축 및 대수선공사 설계용역의 준공기한 연기를 검토하고 그 결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 계동(2-39번지) 공공한옥 증축 및 대수선 공사 설계용역

○ 용 역 사 : 민우원건축사사무소

○ 용역내용 : 중간 및 실시설계(증축 대수선)

○ 계약금액 : 16,489천원

○ 계약기간(당초) : 2020. 5. 28 ~ 8. 31

□ 추진경과

○ ‘20. 5. 28     : 용역 착수

○ ‘20. 7. 17     : 중간보고회 개최

○ ‘20. 8. 28     : 준공기한 연기 검토 요청(SH공사)

□ 준공기한 연기사유

○ ‘코로나-19’에 의한 서울시 보고 및 과업추진 지연 발생

− 사업부서 전원 재택근무 등으로 인한 불가피한 지연*****

− SH공사 요청에 의해 지적측량 결과 반영한 기존도서 추가 검토*****

− 전문가 자문회의 자료 작성 및 결과 반영*****

□ 계약변경 사항

○ 변경내용 : 준공기한 연기(40일)

구 분	변경 전	변경 후	비고
용역기간	2020. 5. 28 ~ 8. 31	2020. 5. 28 ~ 10. 9	40일 연장
용역금액	16,489천원	16,489천원	변동 없음

□ 검토의견

○ SH공사에서 검토 요청한 준공기한 연기 내용이 적정하게 판단되어 계약변경(‘20. 10. 9일까지 준공기한 연장) 처리코자 함

□ 향후계획

○ ‘20. 8 ~     : 계약변경 및 건축심의(종로구)

○ ‘20. 10 ~    : 용역준공 및 공용건축물 협의

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 요청(SH공사, 용역사) 각1부.  끝.