문서번호	교통운영과-13760
결재일자	2020.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		교통안전팀장		교통운영과장
손태빈		김세교		09/03 강진동
협 조

무단횡단 금지시설 설치사업

예산 재배정 변경(추가) 보고

2020. 9

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

무단횡단 금지시설 설치사업

예산 재배정 변경(추가) 보고

보행자의 교통사고 예방을 위하여 무단횡단 금지시설 설치 위치를 선정하고 소요예산을 재배정 하였으나 사업부서로부터 예산 추가 배정 요청이 있어 이에 대한 조치 계획 보고임

□ 추진사항

○ 교통운영과-7120(’19.11.20) : 20년 무단횡단 금지시설 설치 대상구간 조사 협조 요청(교통운영과 → 서울지방경찰청)

○ 교통운영과-4421(’20.3.13) : 무단횡단 금지시설 예산 재배정 계획 보고

□ 무단횡단 금지시설 설치 사업비 추가 요청 사항

○ 동부도로사업소 도로보수과-8555(’20.9.3) : 예산 추가 재배정 요청

○ 관할 경찰서와 협의하여 무단횡단 금지시설 설치 대상지점을 선정하고 ’20.3월 소요예산을 재배정 하였으나 실시설계 결과 시설물 설치를 위한 차로 재구획 노면표시 물량 증가 등으로 사업비 추가 반영이 필요한 사항임

○ 예산 변경 내역

부 서	사업비(당초)	사업비(변경)	비 고
동부도로사업소 도로보수과	470,000천원	540,000천원	증 70,000천원

□ 조치계획

○ 위와 같이 사업시행에 필요한 추가 예산을 재배정하여 무단횡단 금지시설 설치사업 추진에 만전을 기하고자 함

○ 예산 현황(교통사망사고 줄이기 – 시설비)

(단위:천원)

예산현액	기배정액	금회배정액	잔 액
13,938,000	13,750,640	70,000	117,360

□ 추진계획

○ 2020. 9월 : 예산 추가 재배정

○ 2020. 9월 ~ 11월 : 사업 시행 및 완료

붙  임 : 예산 추가 재배정 요청 공문.  끝.