문서번호	급수운영과-18531
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		급수관리팀장	급수운영과장
강병국		주은선	09/03 변재홍
협조
	주무관		윤원희

『목동배수지~신목중학교삼거리외1개소 장기사용 송배수관 정비공사』

공사 추진실정 보고

2020. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

『목동배수지~신목중학교삼거리외1개소 장기사용 송배수관 정비공사』

공사 추진실정 보고

우리사업소 관내 「목동배수지~신목중학교삼거리외1개소 장기사용 송배수관 정비공사」의 공사시행중 작업변경사항이 발생하여 검토후 보고 드림

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 목동배수지~신목중학교삼거리외1개소 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공 사 기 간 : 2020. 5. 11. ~ 2020. 12. 30.

○ 공 사 개 요 : 송배수관 부설 D=50~1200mm, L=1,514m

○ 도  급  비 : 1,468,282,510원

○ 계약상대자 : *****************

□ 보고내용

○ 2,3구간 도로굴착허가 및 공사시간 변경사항발생

- 관련근거 : 교통소통대책자문회의 최종결과 통보(교통운영과-8581, 2020.6.1.)

도로점용(굴착복구)허가증

- 허가번호 양천구→ 2020-상수-00133

- 허가번호 양천구→ 2020-상수-00155

- 현황 : 본공사의 2,3구간은 당초 설계시 야간작업으로 계상되었으나 본구간내 아파트단지 주변은 주간공사(09~17시)로 진행해야한다는 교통소통대책자문회의 최종결과 통보 및 도로굴착허가 결과에 따라 주간으로 변경하여 공사시행 하여야 하는 실정임

□ 조치의견

○ 상기 보고사항에 의거 원활한 공사진행을 위해 본공사의 2, 3구간을 야간에서 주간으로 변경시행 코자함

□ 행정사항

○ 공사감독부서인 서울시설공단에 2, 3구간의 공사진행을 야간에서 주간으로 변경시행토록 작업지시하여 공정관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1. 교통소통대책 자문회의최종결과 통보서 1부.

2. 도로굴착점용허가증 2부.   끝.