문서번호	설비부-13172
결재일자	2020.9.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
유영선		오삼록	09/03 이달영
협조

「신림 공영차고지(저류조 포함) 건설」

전기공사 발주 계획

2020. 09.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「신림 공영차고지(저류조 포함) 건설」

전기공사 발주 계획

『신림 공영차고지(저류조 포함) 건설 공사』의 전기공사를 아래와 같이 시행하고자 보고 드림

1		근 거

□ 신림차고지(감) 제2020-171(2020.09.02.)호 : 전기공사 발주 요청 검토 보고

2		추 진 경 위

□ ‘10. 7.21. : 공영차고지 추가 조성계획 수립(부시장방침 제270호)

□ ‘16. 9.12. : 설계용역 발주(건축부)

□ ‘19. 9.30. : 설계용역 완료

□ ‘19.11.17. : 설비분야 발주계획 보고

□ ‘19.11.17. : 수변전설비, 전력간선, 전등․전열, 태양광발전 등

□ ‘19.12. 4. : 계약심사 요청(전기공사)

□ ‘19.12.10. : 계약심사 결과 통보(전기공사)

4		발 주 계 획

□ 공 사 명 : 신림공영차고지 건설 전기공사

□ 위    치 : 서울시 관악구 신림동 140-2

□ 공사규모

- 공영차고지	: 10,232㎡, 건물5개동(관리동,정비동,세차동,설비동,충전소)

- 진입도로	: 2,051㎡( 폭10~12m, 연장153m)

- 저류조(지하2층) : 면적7,000㎡, 용량35,000㎥

□ 공사내용

- 수변전설비, 전력간선, 전등․전열설비, 태양광발전 설비 등

□ 공사기간 : 착공일로부터 2023년 12월 20일

- 1차 : 착공일로부터 2020년 12월 20일

*****************************

*************************************

*******************************************

□ 노무비 및 자재 단가 조정

- 2019년 설계가 완료되어 계약심사를 2019년 12월 완료하였으나 토지보상 지연 및 선행 공종인 토목공사가 지연되어 효율적인 예산집행을 위하여 전기공사 발주 시기가 2020년 하반기로 조정되어 노무비 및 자재단가를 2020년 단가로 반영하고,

□ 고용개선지원비 공사원가 반영

- 서울특별시장 방침 제114호(2020.6.12.), 건설혁신과-8412호(2020.6.29.)에 따라 고용개선지원비(주후수당 지급, 건강보험료․국민연금 지원, 고용개선장려금 지급)를 공사원가에 반영하여 발주하고자 함.

□ 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁(시공능력평가액) 및 장기계속공사

□ 입찰참가 자격 및 제한

자격 (면허)	- 입찰참가신청 서류 접수마감일까지 전기공사업법에 의한 전기공사업 등록 업체
참가 제한	- 전기공사업 시공능력평가액이 3,213백만원 이상인 업체
지역 의무 공동 도급	- 지역의무 공동도급 대상공사이므로 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 서울특별시에 주된 영업소를 둔자를 반드시 구성원으로 하여야 하고, 지역업체의 최소 참여비율은 49% 이상이어야 함 - 단, 지역업체가 입찰참가 자격 요건을 모두 갖춘 경우 단독 입찰 가능함
공동 계약	- 공동이행 방식의 공동도급이 가능하며, 공동 수급체 구성원은 2개사 이내로 함 - 구성원별 계약참여 최소비율은 5% 이상이어야 하며, 공동수급체 대표는 출자 비중이 큰 업체로 함 공동수급체를 구성하는 경우 해당 지역업체와 그 외 지역업체 간에는 독점규제 및 공정거래에 관합 법률에 따른 계열회사(상호출자제한 기업진단 소속)가 아니어야 함

5		향 후 계 획

□ 2020.09월 : 일상감사 의뢰 및 공사발주

□ 2020.10월 : 공사계약 및 착공

□ 2023.12월 : 공사준공(예정).  끝.