문서번호	지역돌봄복지과-16578
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	김은숙	09/04 하영태

- 광장종합사회복지관 장애인화장실 환경개선 공사 -

2020년 확정 기능보강사업 변경 검토보고

2020. 9.

복 지 정 책 실

(지역돌봄복지과)

- 광장종합사회복지관 장애인화장실 환경개선 공사 -

2020년 확정 기능보강사업 변경 검토보고

세부공사 내용을 변경하고, 낙찰차액으로 전기공사를 추가하고자 변경요청한 건으로 본 공사와 연계된 사업의 효율성 증대를 위해 사업변경은 타당함

□ 요청사항

◯ 2020년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(광진구 복지정책과-32429, 2020.8.27.)

◯ 시 설 명 : 광장종합사회복지관

◯ 사 업 명 : 장애인 화장실 리모델링 설계용역 및 환경개선 공사

◯ 요청내용 : 세부공사 내용·시공공법 변경 및 전기공사(추가)를 위한 낙찰차액 사용 승인요청

□ 사업변경 신청사항

◯ 장애인화장실 리모델링에 따른 세부공사 내용 및 시공공법 변경

- 장애인 화장실 리모델링을 위한 설계용역 결과 당초 대비 공사비 증가로, 예산범위 내 집행을 위해 시공공법 및 내용을 변경하고자 함

- *************************************

기 존	변 경(안)	비 고
벽타일, 바닥타일 전체 철거 후 재설치	기존 벽타일에 덧붙임 시공, (단 바닥으로부터 300mm는 방수를 위해 철거 및 신규 타일설치)	바닥타일은 기존 계획대로 바닥타일 철거 및 방수시공후 바닥타일 설치
자동 물내림비데 4개 설치	비데 미설치	전자식 자동 물내림 대변기로 대체(비용절감)
장애인양변기 등받이 4개 미설치	장애인양변기 등받이 4개 설치	장애인 편의시설기준에 따른 설치 필요
세면기 장애인 손잡이	세면기 장애인 손잡이 미설치	화장실 공간활용 이용 용이성과 비용절감(지체장애인편의시설지원센터 협의)
장애인용 큐비클 문 접이용으로 설치	장애인용 큐비클 문 스윙식으로 설치	비용절감(지체장애인편의시설지원센터 협의)
거울 4개 미설치	거울 4개 설치	기존 화장실 철거후 거울 재설치 필요
점자블록 8개, 화장실 촉지판 미설치	점자블록 8개 설치, 화장실촉지판 4개 설치	장애인 편의시설기준에 따른 설치 필요
소제용 수채 2개 미설치	소제용 수채 설치 2개	기존 화장실 철거로 청소 소제용 수채의 재설치 필요
비누대, 컵대, 수건걸이, 화장지걸이대 미설치	비누대, 컵대, 수건걸이, 화장지걸이대 설치	기존 화장실 철거로 화장실 용품 설치 필요

◯ 전기공사(추가)를 위한 낙찰차액 사용승인

- 당초 신청내역에 전기공사(장애인 비상벨, 전기온풍기 전열선, 전원콘센트, 전등 재설치)가 반영되어 있지 않아 낙찰차액 **********************하여 전기공사를 추가 진행하고자 함

□ 검토결과 : “승인”

◯ 승인내역 – 세부공사 내용·시공공법 변경 및 전기공사 낙찰차액 사용 승인

◯ 검토의견

- 장애인화장실 리모델링 설계용역과 당초 사업비 간 차이가 있어 예산 내 집행을 위해 장애인 편의시설 기준을 적용하여 시공공법을 변경하였으며,

- 전기공사는 본 공사와 연계된 사업으로 사업비의 효율성 증대를 위해 세부공사 내용 변경과 낙찰차액으로 전기공사 ******* 사용을 승인

□ 기능보강사업 변경 대비표

◯ 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업명	기 존			변 경	비고
	예 산		내 용
장애인 화장실 리모델링 설계용역 및 환경개선 공사	시비	******	***************** *****************	**************** ***************** *****************************************	***************
	구비	******
	자부담	*
	총액	******

붙 임 : 1. 자치구(광진구) 사업변경 승인요청 공문 각 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 검토자료 일체.