문서번호	설비부-13207
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영화		이종근	09/04 이달영
협조
	주무관		김수진

동부간선도로 확장(2공구) 관련

도봉지하차도 관리동 및 도봉어르신문화센터

관 급 자 재  구 매 계 획

2020. 9.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

동부간선도로 확장(2공구) 관련

도봉지하차도 관리동 및 도봉어르신문화센터

관 급 자 재  구 매 계 획

동부간선도로 도봉지하차도 관리동을 증축하여 사업중인 「도봉어르신문화센터 건립」관련 설계진행 후 사업계획변경(토목부 방침)이 완료됨에  따라 관급자재 발주를 시행하고자 구매계획을 아래와 같이 검토 보고 드림.

1		관 련 근 거

□  도봉지하차도 관리동 증축 사업계획 변경

: 토목부 - 6414호(‘18.4.13.)

□  도봉지하차도 관리동 증축 사업계획 변경(2차)

: 토목부-16546호(‘20.8.27.)

2		관리동 및 증축개요

□ 공간구성 변경

구 분	층 별	사용면적(㎡)	사용주체	내 용
기존	지하2	17.85	서울시(도기본)	제연설비 등(제연설비 면적 548.10㎡ 제외)
	지하1	644.99	서울시,도봉구	기계실, 전기실 등
	1층	184.92	서울시	도로 관리사무소
		285.80	도봉구	도봉문화센터
증축	2층	785.89	도봉구 (변경1차)	발달장애인 평생교육센터
	3층	778.00		보훈회관 (추가)
	4층	739.93		노인문화센터
	5층	774.21	도봉구 (변경2차)	노인문화센터
	옥탑층	34.20		계단실,엘리베이터 (추가)

□ 총사업비 변경 : 증7,583백만원

[단위:백만원]

구 분		당 초	변 경			증 감
			서울시 부담	도봉구 부담	계
시설비	토목, 건축	5,139 (관리동만) 9,635 (변경1차)	3,232	7,513	10,745	증6,754
	소방/설비		684	1,676	2,360
	전기/통신		1,223	2,061	3,284
	소 계	9,635	5,139	11,250	16,389
설계 및 감리비		별도	-	829	829	증578
총사업비		9,635	5,139	12,079	17,218	증7,583

※ 관련공사는 하자처리 일원화 및 신속한 공사추진을 위해 동부간선도로          확장 2공구 분야별 공사(토목,전기,통신 등)에 포함하여 시행.

(관련문서 : 도봉지하차도 관리동 증측 사업계획변경(2차) 토목부-16546호)

□ 공사기간 변경 : 증 10개월

- 당초 : ‘08. 02. ~ ‘20. 12. ⇒  변경 : ‘08. 02 ~  ’21. 10.

3		관급자재 구매 계획

□ 관련 규정

-『조달사업에 관한 법률』 제5조의2 및 같은법 시행령 제9조의3 제1항

-『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』 제7조 및 제12조

□ 구매 방법 : 조달 발주

□ 소요 예산 : 580,679천원

□ 품목별 구매방법

분 야		품 명	금 액 (천원)	계약방법	납품시기
관리동 (지하2층 ~ 지상1층)	전기	수배전반	69,542	3자단가	20.12.
		조명기구	29,977	3자단가	20.12.
	합계		99,519
도봉 어르신 문화센터 (지상1층 ~ 5층)	전기	분전반	54,906	3자단가	20.12.
		조명기구	49,554	3자단가	20.12.
		태양광 발전설비	146,076	2단계경쟁	21.03.
		전기차 충전설비	38,707	3자단가	21.03.
	통신	통합배선	82,608	공개경쟁(총액)	20.12.
		전관방송	20,562	3자단가	20.12.
		AV설비	34,747	3자단가	21.03.
		CCTV	54,000	3자단가	21.03.
	합 계		481,160
총 합 계			580,679

4		향 후 계 획

□ ‘20. 09. : 관급자재 발주 및 계약

□ ‘21. 10. : 공사준공

붙임 : 1. 도봉지하차도 관리동 증축 사업계획 변경(2차) 1부. 끝.