문서번호	시설보수과-6504
결재일자	2020.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
윤동원		09/04 류태용
협조

- 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

설계변경(정산) 보고

2020. 09.

개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

설계변경(정산) 보고

「개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사」와 관련, 기 보고한 공사물량 증·감 및 각종보험료 미사용 등에 따른 최종 정산 처리된 설계변경내역에 대한 검토보고임.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 개화지하차도외 5개소 차량방호울타리 교체공사

○ 공사기간 : 2020. 5. 27 ~ 2020. 09. 23

○ 공사규모

- 고재처리 19,850㎏, 콘크리트단면보수 81㎡, 기타부대공 1식

○ 도 급 비 : 79,023,700원

○ 도 급 자 : ㈜휴먼하우징텍 대표 권오연

○ 예산현황 : 총공사비 780,502천원

(도급비 86,823천원. 관급자재비 689,953천원. 이전비 3,725천원)

	< 예산현황 >
▷발주금액: 704,192천원(도급비 89,930, 관급비 611,000, 이전비 3,262) ▷계약금액: 659,149천원(도급비 79,023, 관급비 577,010, 이전비 3,116) ▷변경금액: 780,502천원(도급비 86,823, 관급비 689,953, 이전비 3,726) ※ 낙찰차액 및 개화지하차도외 1개소 보수공사 집행잔액(113,553천원) 활용

Ⅱ		설계변경(정산) 검토보고

○ 관련근거

- 시설보수과-5816(2020.7.24.) : 현장 실정보고

- 시설보수과-6336(2020.8.25) : 관급자재 변경구매 보고

○ 도급비 변경내용 : (증) 7,799천원

- 방호울타리철거 : (증)7,535천원

- 콘크리트 보수 : (증)1,689천원

- 부대공 : (증)4,045천원

- 제경비(보험료) 미사용에 따른 실정산 반영 : (감)5,470천원

· 건강보험료         : 당초 1,334,814원 → 정산 0원

· 노인장기요양보험료 : 당초   137,843원 → 정산 0원

· 연금보험료         : 당초 1,814,592원 → 정산 0원

· 퇴직공제부금       : 당초   927,458원 → 정산 0원

· 안전관리비         : 당초   917,621원 → 정산 190,000원

· 환경보전비         : 당초   389,821원 → 정산 0원

· 건설기계대여대금   : 당초   138,603원 → 정산 0원

○ 관급자재(현장설치도) : 689,953천원(정산)

○ 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증, 감	비고
총 공사비	659,149,354	780,501,420	(증) 121,352,067	(단위:원)
도 급 비	79,023,700	86,823,000	(증) 7,799,300
관 급 비	577,009,801	689,952,680	(증) 112,942,879	현장설치도
이 전 비	3,115,853	3,725,740	(증) 609,887

○ 예산과목

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 신정교접속교외 1개소 차량방호울타리 교체, 시설비 및 부대비, 시설비 (도급비 품의 44, 관급비 품의 42)

- 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 개화지하차도외 1개소 차량방호울타리 보수, 시설비 및 부대비, 시설비 (도급비 품의 43, 관급비 품의 41)

- 도로시설과, 도로시설관리, 지하차도시설관리, 여의2지하차도 보수, 시설비 및 부대비, 시설비 (관급비 품의 52)

Ⅲ		검토의견 및 조치계획

○ 공사진행중에 현장실정 보고된 사항에 대하여 기 승인 처리한 내용이 반영되었고, 계약자가 납입확인서를 미제출한 보험료 등에 대하여 실정산 반영

○ 관급자재는 현장설치도로서 별도정산

붙임  1. 설계변경(정산) 설계도서 1부.

2. 현장실정보고서 및 검증확인서 1부.  끝.