	서울식물원
수신	기획행정과장
(경유)
제목	식물문화센터 경관개선사업 설계변경 시행

1. 시설운영과-6556(2020.9.3.)호와 관련입니다.

2. □식물문화센터 경관개선사업□ 추진과 관련하여 현장여건에 따른 공종변경이 발생하여 아래와 같이 설계 변경하여 시행코자 합니다.

가. 공 사 명: 식물문화센터 경관개선사업

나. 대 상 지: 식물문화센터 1층 야외 화단

다. 공사기간: 2020. 7. 16. ~ 9. 4.

라. 공사내용: 휴게공간 조성 및 수목식재 등

마. 도 급 자: 자경원 대표 김보연

바. 도 급 비

- 당  초: 금45,810천원

- 변경후: 금41,713원(감4,097원)

사. 변경사유: 현장여건에 따른 물량 조정

아. 예산과목: 서울식물원 시설운영과, 식물종다양성보전을 통한 세계적수준의식물원운영, 식물원운영관리 및 이용활성화, 식물원 운영 및 식물문화조성, 시설비

붙임 1. 설계변경보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율검증결과 1부.  끝.

	시설운영과장
주무관	박주환		시설운영과장	09/04 배효성
협조자
시행	시설운영과-6593	(		)	접수		(		)
우	07789	서울특별시 강서구 마곡동로 161 서울식물원 (마곡동)	/
전화	02-2104-9726	/전송	02-2104-9709	/	john7808@seoul.go.kr	/	부분공개(5)