문서번호	토목부-17160
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
윤효진		최진우	09/04 김용제
협조
	주무관		이상근

중간집하장 변경 검토 보고

(세종대로 도로공간 재편사업 1,2구역)

2020. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

중간집하장 변경 검토 보고

(세종대로 도로공간 재편사업 1,2구역)

본 공사 당초 설계에 적용된 중간집하장 부지 사용이 불가하여 공사 구간에 인접한 중간집하장을 선정하여 변경코자 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 중간집하장 변경건에 대한 검토 보고[세종수 제2020-23호('20.8.20.)]

○ 당사 부지사용 협조요청 관련 회신[한국철도공사 서울본부 경영인사처-6760호('20.7.13.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 위    치 : 세종대로 사거리 ~ 서울역 교차로

○ 규    모 : 보행친화공간 재편사업 L=1.55㎞

- 토목 : 차로축소 8~12차로 → 6~9차로, 보도확장 및 자전거도로 설치 등

- 조경 : 가로 숲 조성, 수목이식, 띠 녹지 조성, 수목보호판 설치 등

○ 사업기간 : 2020.07. ~ 2020.12.

○ 도 급 비 : 18,122백만원

Ⅲ		건설사업관리단 보고내용

○ 당초 설계에 선정된 서울역 부근 공터부지에 대해 협의한 결과 사용이 불가능하여 공사 구간내 인접한 중간집하장으로 변경 선정코자 함.

○ 중간집하장 변경 현황

구 분	당 초	변 경		비고
		1구역	2구역
위 치	***********	********************	************************
면 적	******	******	******
임대기간	***	*****	*****
임대비용	******	******	******

○ 위치도 및 현황사진

구 분	위 치 도	현황사진
1구역
2구역

○ 공사비 증·감 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
1 구 역	***********	***********	**************
2 구 역	***********	***********	**************
계	***********	***********	**************

Ⅳ		조 치 의 견

○ 중간집하장 변경건에 대하여 검토한 결과 책임건설사업관리기술인의 검토의견은 적정하므로 추후 설계 변경에 반영하여 정산코자 함.

붙임 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 관련 공문 각 1부.  끝.