문서번호	도로보수과-4826
결재일자	2020.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		이수범	09/07 장상규
협조

설계변경(1회) 검토 보고

(2020년 포장도로 긴급복구공사-연간단가)

2020. 9. 7.

성동도로사업소

도로보수과

설계변경(1회) 검토 보고

(2020년 포장도로 긴급복구공사 - 연간단가)

금년 장마기간중 포트홀이 다수 발생됨에 따른 공종별 물량 증·감이 발생 하였고, 낙찰차액 사용가능 공문에 의거 낙찰차액 사용 및 도로 물고임 정비계획에 의한 배정예산을 포함하여 설계변경코자 함.

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 2020년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

❍ 규    모

- 절삭후덧씌우기 : 155a

- 소규모 인력포장 : 96a

- 공동복구 : 101개소

- 야간긴급출동 : 2,440시간

- 부대공 1식

❍ 예    산 : *********

*****************************************************    ❍ 계약금액 : ***************

❍ 계 약 자 : **************

❍ 공사기간 : 2020. 4. 27. ~ 2020. 12. 31.

❍ 공 정 률 : 70%

□ 관련근거

❍ 낙찰차액 사용관련 공문 : 예산담당관-4883(’20.4.3.) 낙찰차액 228,802천원

- 동일단위사업내 세부사업간 동일편성목으로 예산변경 사용가능

사업계획 변경에 따른 물량확대의 경우에도 기존 계약 낙찰차액 사용가능

❍ 도로물고임 예산배정 : 도로관리과-14874(’20.5.20.)

- 도로 물고임 발생구간 일제 정비계획 통보(24개소 87,300천원)

❍ 설계변경(1회) 검토보고 : 한국건설관리공사 기술연구소-1910(’20.9.3.)

□ 보고내용

❍ 장마기간 집중호우에 따른 포트홀, 망상균열, 도로소파가 다수 발생됨에 따른 공종별 정비물량 변경

❍ 도로 물고임 발생구간 일제 정비계획에 따른 소규모 포장 정비물량 증가에 따른 물량변경

□ 설계변경내용

❍ 주요공종별 물량 변경

공 종	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증 ․ 감
절삭후 아스팔트덧씌우기	t=5cm	a	155	33	감122	소파포장공종별 실시공 수량에 따른 변경
소파보수	B-Type, 15㎡이하 (110.6㎡/day), 야간	a	20	13	감7
소파보수	B-Type, 15㎡초과~30㎡이하 (124.6㎡/day), 야간	a	33	48	증15
소파보수	B-Type, 30㎡초과~60㎡이하 (140㎡/day), 야간	a	22	103	증81
소파보수	B-Type, 60㎡초과 (176㎡/day), 야간	a	21	20	감1
긴급소파보수 (야간당직출동)	긴급소파보수(3인출동) hr당, 주간	hr	0	9	증9	실제근무시간에 따른 변경
	긴급소파보수(3인출동) hr당, 야간	hr	240	200	감40
	긴급소파보수(3인대기) hr당, 야간	hr	2,200	1,689	감511

❍ 변경금액

구 분	설계변경 금액(원)			비고
	당 초	변 경	증·감
총 공 사 비	1,730,867,400	2,040,000,000	증)309,132,600
도 급 비	1,444,167,400	1,855,900,000	증)411,732,600
관급 자재비	266,700,000	184,100,000	감)82,600,000
이 전 비	20,000,000	0	감)20,000,000

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 한국건설관리공사 기술연구소-1910(2020.9.3)호 : 시공자로부터 제출된  설계변경(1회) 내용의 주요반영사항에 대해 공사계약 일반조건 및 건설사업관리 업무지침서에 근거하여 검토한 결과

❍ 설계변경 사유와 수량 및 공사비 산출의 적정여부 검토결과 적정하게 반영되었음

□ 조치의견

○ 건설사업관리책임기술자 적정검토 의견과 예산범위내 설계변경 요청된   사항으로 제비율 검증결과 적정 반영되었는바

○ 건설사업관리책임기술자 의견대로 예산 범위내에서 공종별 물량 증·감에 대하여 설계변경 시행하고자 함.

붙 임  1) 설계 변경 내역서 1부.

2) 제비율 검증 확인서 1부.

3) 도로물고임 예산배정 공문 1부.

4) 낙찰차액 사용관련 공문 1부.

5) 책임건설사업관리기술자 검토의견서.  끝.