문서번호	시설보수과-7205
결재일자	2020.9.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설보수과장	북부도로사업소장
이영택	오재섭	09/07 고영준
협 조

하계지하보도 출입시설 개선시행 검토보고

2020. 9.

북부도로사업소

(시설보수과)

하계지하보도 출입시설 개선시행 검토보고

하계지하차도 내 보도의 출입시설(캐노피 형식) 개선을 위한 예산이 재배정됨에 따라 개선공사를 조속히 시행하여 안전하고 쾌적한 보행환경을 제공하고자 함.

□ 관련근거

○ 하계지하차도 내 보도 출입시설 개선계획【시설보수과-2830(‘20.3.27.)호】

○ 하계지하보도 출입시설 개선 실시설계 완료 보고【시설보수과-6407(‘20.8.11.)호】

○ 예산 재배정 통보【도로시설과-10064(‘20.9.05.)호】

□ 주요 추진경위

○ ‘20.02.17. : 하계지하보차도(공릉역방향) 개선 요청(노원구청)

○ ‘20.03.27. : 하계지하차도 내 보도 출입시설 개선계획 수립

○ ‘20.03.~07. : 실시설계 시행(용역사 : 동해종합기술공사)

○ ‘20.08. 11. : 실시설계용역 완료

□ 출입시설 개선

○ 지하보도 상부 출입시설 개선(축소 2개소, 폐쇄 2개소) 및 보도 확폭

○ 지하보도내 배수펌프 등 장비 반출입을 위한 출입문 설치(신설 1개소)

○ 주요 개선안

축소(안)	폐쇄(안)

□ 보고내용

○ 하계지하보도 출입구(캐노피) 구조물로 인하여 횡단보도상 차량 및 보행자간 시거를 간섭하고 있는 보도상 출입시설을 개선하여 안전사고 예방 및 보행환경을 개선하기 위한 사업으로써

○ 개별 발주시 입찰, 계약, 착공준비 등에 상당한 시일이 소요되어 신속한 공사추진 불가로 조기 민원 해소가 어려울 뿐만 아니라, 현장사무실, 창고, 가설휀스 등 별도의 부대경비가 소요됨에 따라

○ 연내 신속한 사업추진 및 효율적인 예산집행 등을 위하여 우리사업소에서 시행중인『도로시설물(터널, 복개, 지하차도 등) 일상유지보수공사』를 활용하여 시행함이 타당할 것으로 사료됨.

□ 조치계획

○ 조기 공사완료를 위하여『도로시설물(터널, 복개, 지하차도 등) 일상유지보수공사』도급업체에 작업지시후 공사를 시행하고자 하며,

○ 추후 설계변경 및 정산에 따른 낙찰율 등 발생 잔액(45백만원)에 대하여는  각종 민원 및 시설보수 등 도로시설물 일상유지보수 재원으로 활용하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

- 소요예산 : 340,000천원(도급비 332,600, 폐기물처리비 7,400)

- 예산과목 : 도로시설과, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개, 지하차도, 세척) 일상유지보수, 시설비

붙임  1. 공사내역서 1부.

2. 설계도면 1부.  끝.