코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	남산 회현자락 유적전시관 전기공사(지중매입등 설치)

예산과목 : 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서 : 문화본부 한양도성도감)

한양도성도감-8993(2020.9.3.)호와 관련하여 설계변경에 따른 지출품의를 등록하고자 합니다.

1. 사 업 명 : 남산회현자락 유적전시관 전기공사

2. 지출사유 : 진입로 12개소 외부경관등 철거 후 지중매입등 설치로 인한 설계변경

3. 금    액 : 금5,039,160원(금오백삼만구천일백육십원)

.  끝.

★주무관							최광호			도성관리팀장					이원재					한양도성도감과장					09/07 안중호
협조자
시행			한양도성도감-9066									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문 청사 1동 5층															/			http://www.seoul.go.kr
전화								/전송								/													/	부분공개(5)