문서번호	치수과-14237
결재일자	2020.9.7.
공개여부	비공개(5)
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김한성		김경원		민병기		09/07 손경철
협조

★ ◉

「광나루로 214 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)」 준공검사 검토보고

2020. 9.

(안전건설교통국 치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 물재생계획과 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항

「광나루로 214 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)」

준공검사 검토보고

우리 구에서 시행 중인『광나루로 214 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)』에대하여 준공검사원이 접수되어 아래와 같이 검토 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명: 광나루로 214 주변 하수사각형거 보수공사(1구간)

▢ 위    치: 광나루로 214 ~ 왕십리로14길3

▢ 기    간: 2020. 3. 10. ~ 2020. 9. 6.

▢ 규    모: ▣2.2m×2.0m ~ ▣4.0m×2.5m, L=1,120m, 단면보수 1,868㎡

▢ 계약금액: 610,820,000원

▢ 도 급 자: ㈜뉴램건설 대표 한영의

Ⅱ		보 고 내 용

▢ 우리구와 계약 체결하여 공사 시행한 「광나루로 214주변 하수  사각형거 보수공사(1구간)」에 대해 준공검사원이 접수되어 관련 서류 및 현장 확인한 바, 계약내용과 같이 공사 완료됨.

▢ 기타경비 준공정산내용: 계약내역과 변동없음

○ 산재․고용보험료: 완납증명서 확인

○ 퇴직공제부금비: 납부증명서 확인

○ 건강, 연금, 노인장기요양보험료: 해당없음

○ 산업안전보건관리비: 관련 규정에 적합한 지출 증빙 확인

○ 예산과목: 물재생계획과, 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비(하수도사업 특별회계)

○ 준공내역

계 약 내 용		준 공 내 용
계약금액	610,820,000원	준공금액	610,820,000원
		참고사항 (기지급금)	선급금	326,000,000원
			노무비	96,085,000원
			합 계	422,085,000원
계약일자	2020. 3. 10.	착 공 일		2020. 3. 11.
준공기한	2020. 9. 6.	준 공 일		2020. 9. 2.

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 준공검사 결과, 설계서 및 그 밖의 계약 내용과 같이 완료되었기에준공 처리코자 함.

붙임  1. 준공검사원 지정요구 및 검사의뢰서 1부.

2. 준공확인요청서, 준공계 1부.

3. 준공내역서 1부.

4. 준공검사 및 준공 사진대지 각 1부.