문서번호	도로계획과-12343
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	광역도로계획팀장	도로계획과장
심유경	代심유경	09/08 안대희

「한강대교~강변북로 진입램프 신설 타당성 조사」

설계변경(정산) 검토보고

2020. 09.

안전총괄실

(도로계획과)

「한강대교~강변북로 진입램프 신설 타당성조사」

설계변경(정산) 검토 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 한강대교~강변북로 진입램프 신설 타당성조사 용역

○ 주요내용 : 진입램프 신설 및 도로체계 개선안에 대한 경제적 타당성 검토

○ 계약금액 : 금사천삼백일십구만구천원정(금43,199,000원)

○ 용역기간 : 2019.08.29. ~ 2020.09.30.

○ 계 약 자 : 에이스톤엔지니어링㈜

□ 보고내용

○ 계약변경(정산)

- (당초) 43,199,000원 → (변경) 41,849,000원 (감 1,350,000원)

구 분			금 액	증·감
총 용 역 비		당 초	43,199,000원	감1,350,000원
		변 경	41,849,000원
	공급가액	당 초	38,044,545원	-
		변 경	38,044,545원
	부가가치세	당 초	3,804,455원	-
		변 경	3,804,455원
	자 문 비	당 초	1,350,000원	감1,350,000원
		변 경	0원

- 사 유 : 자문비 정산에 따른 감액 조치

□ 향후계획

○ ’20.09.30. : 변경계약 및 용역 준공

붙임  1. 합의각서(정산에 따른 변경계약) 1부.
2. 변경(정산) 내역서 1부.  끝.