★

문서번호	도로과-16919
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(5)

담 당	보도관리담당	도로과장		건설교통국장
남창림	이기영	유충현		09/08 서형석
협 조
	도로조명담당		박정재

2020년 삼양로 보행환경 개선사업

연계구간 정비계획 보고

2020. 9.

건설교통국

도  로  과

2020년 삼양로 보행환경 개선사업

연계구간 정비계획 보고

삼양로 가로등개량공사 사업비 부족으로 보도블록 복구작업 추진이 어려워 보행환경 개선사업 구간 외 부분에 대해서도 가로등 개량과 병행하여 복구공사를 추진하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 삼양로 보행환경개선사업

○ 사업기간 : 2020. 4. 13. ~ 2020. 10. 30.

○ 사업내용 : 보도정비 A=2,700㎡, L형측구 교체 L=1,073m 등

○ 도 급 비 : 383,069,800원

○ 도 급 자 : 성원특수건설 대표 이영자

□ 보고내용

○ 삼양로 18 ~ 62 구간 예산 부족으로 가로등 개량공사 추진 어려움

- 노후 가로등 개량사업은 포괄비 형식으로 돌곶이로 및 한천로 사업 추진 후 삼양로 구간을 추진함에 따라 예산 부족으로 삼양로 18 ~ 62 구간 가로등 개량공사 추진이 불가

- 노후 가로등 개량사업 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	합계	돌곶이로	한천로	삼양로
예산액	850	400	250	200

○ 삼양로 일대 환경개선 및 주민안전을 위해 가로등 개량공사 마무리 필요

- 삼양로의 가로등 개량으로 도시미관 및 야간 통행환경 개선으로 주민 안전을 확보하기 위해 전구간 가로등 개량이 필요한 실정임

○ 삼양로 가로등 일부만 개량시 삼양로 일대 정비 개선효과 반감

- 가로등 선로 굴착작업 시 불규칙적이고 비선형적으로 이루어져 굴착부분만 보도 정비할 경우 신규 보행환경 개선구간과 확연히 비교되어 삼양로 보행환경 개선사업의 효과가 반감될 것으로 판단됨.

□ 검토결과

○ 삼양로 보행환경 개선공사에 미포함된 구간의 보도정비 반영

- 「삼양로 보행환경 개선공사」의 개선효과 극대화와「삼양로 가로등 개량공사」의 신속한 마무리를 위해 미 포함 구간의 보도정비를「삼양로 보행환경 개선공사」반영

□ 정비계획

○ 정비위치 : 삼양로 18 ~ 삼양로 62

○ 정비규모 : B=2.3m, L=480m

○ 소요예산 : 60백만원

○ 공사별 추진공정 구분

- 「삼양로 가로등 개량공사」는 전 구간에 걸쳐 실시하되 가로등 정비업체는 보도블록 철거, 가로등 선로매입을 위한 굴착 및 노체복구

- 「삼양로 보행환경 개선사업」에서는 가로등 개선공사에서 노체복구 완료 후 입도기층재 포설, 모래층 및 보도블록 재포장

○ 기타사항

- 삼양로 보행환경 개선사업의 낙찰차액 등 집행잔액(69백만원)을 활용하여 사업 추진

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 굴착부분 복구를 삼양로 보행환경 개선공사에서 시행하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.  끝.