문서번호	치수과-15818
결재일자	2020.9.8.
공개여부	대시민공개

주무관	치수담당		치수과장		건설교통국장
지영호	김재준		김윤기		09/08 서형석
협 조

- 성북천 분수마루 정비공사 -

설계변경(정산) 보고

2020. 9.

건 설 교 통 국

(치   수   과)

- 성북천 분수마루 정비공사 -

설계변경(정산) 보고

우리 구에서 시행 중인 「성북천 분수마루 정비공사」에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 성북천 분수마루 정비공사

공사기간 : 2020. 5. 25. ~ 2020. 9. 10.

공사규모 : 바닥분수 설치 A=55㎡, 분수마루 주변 환경개선 1식

도급금액 : 374,714,000원

도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종

Ⅱ		보 고 내 용

공사 실정보고에 따른 설계변경 시행

○ 치수과-7875호(2020.5.21.) : 낙찰차액 사용계획

- 건설폐기물 처리용역 발주 등

○ 치수과-15696호(2020.9.7.) : 공사 실정보고

- 토공, 시설물공, 포장공, 부대공 등 현장여건 반영

기타 단순물량 증·감

Ⅲ		설계변경 내용

주요물량 변경 현황

공 종	규 격	단위	수 량		증 · 감
			당 초	변 경
폐기물 운반	현장→중간집하장, 4.5DT+0.4BH	㎥	-	143	증	143
전선관 터파기	전선관 PE54	M	-	51	증	51
화강판석 HOLE천공	D100mm	공	-	35	증	35
교통센터 전기이설		식	-	1	증	1
아스팔트 표층포장	t=50	a	-	4.52	증	4.52
조립식 과속방지턱 설치	1000*1000*75	M	-	35	증	35
아스팔트콘크리트	#78 WC-2 표층용	ton	-	54	증	54

사업비 변경 현황

구 분	당 초(천원)	변 경(천원)	증 · 감(천원)		비 고
총 공사비	427,036	469,016	증	41,980
도 급 비	374,714	387,640	증	12,926
관 급 비	23,592	38,357	증	14,765
이 전 비	18,100	31,249	증	13,149
폐 기 물	10,630	11,770	증	1,140

Ⅳ		처 리 계 획

상기 설계변경 사유와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 함

붙  임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.  끝.