문서번호	토목부-17108
결재일자	2020.9.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목설계과장	토목부장
박희정		김동현	09/04 김용제
협조
	간선도로계획팀장		김경호

도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계용역 준공기한 연기 검토 보고

2020.  9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계용역

준공기한 연기 검토 보고

코로나 19와 관련 2.5단계 격상에 따라 보완 노선에 대한 주민설명회 개최가 불가함에 따라 주민설명회 개최 등 주민의견 수렴 및 보완설계 절차 이행 등의 추진을 위해 설계용역 준공기한 연기가 필요하여 검토 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계용역

❍ 위    치 : 서울특별시 중랑구 묵동(기존 묵동IC) 화랑로 진출연결로

❍ 규    모 : 폭 5.0m, 연결램프 1,479m (교량 779m)

- 진출램프(북부간선도로→화랑로) 폭 5.0m, 연장 838.5m

- 진입램프(화랑로→북부간선도로) 폭5.9m, 연장 640.8m

❍ 용역기간 :′20.1.16 ～ ′20. 9.15

❍ 도 급 비 : 680,400천원

❍ 도 급 사 : ㈜천일, ㈜동명기술공단종합건축사사무소, ㈜동희이앤씨,

씨지이앤씨㈜

□ 추진경위

❍ '09.03.~07. : KDI 예비타당성조사 용역 시행(기획재정부)

❍ '13.01.~'15.12. : 실시설계 시행

❍ '19.05.08 : 공사 계약 및 착공

❍ '19.09.10 : 사업계획 변경 검토 보고 (도로계획과)

❍ '20.01.16 : 보완설계용역 계약 및 착수

❍ '20.03.04 : 용역 착수 보고

❍ '20.06.22 : 보완노선 관계구청 협의회 개최

❍ '20.07.23 : 보완 설계노선(안) 설명(전석기 시의원 및 강대호 시의원)

❍ '20.08.03 : 보완 설계노선(안) 설명(고용진 국회의원 및 이은주 시의원)

□ 준공기한 연기검토

❍ 준공기한 연기 : 96일

- 당초 '20.01.16 ～ '20. 9.15 → 변경 '20.01.16 ～ '20.12.20

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 연기사유

- '20.1.16 착수, '20.3.4 착수보고, '20.6.22 노선협의 및 중간회의 등을 거쳐 주민설명회를 통해 보완노선 설계(안)에 대하여 주민의견을 수렴결과에 따라 상세 실시설계를 시행하고자 하였으나,

- 코로나 19와 관련 사회적거리두기 2.5단계 시행에 따라 주민설명회 개최가 불가함에 따라 주민설명회를 개최 등 보완설계에 따른 후속 절차(설계VE, 공공디자인 심의, 건설기술 심의 등) 이행을 위해 준공기한 연기가 필요함

□ 향후계획

❍ 계약상대자에게 준공기한 연기를 통보하고 계약관련 주민설명회 개최 관련 준비 및 후속절차 이행자료 작성에 만전을 기하도록 안내

❍ 준공기한 연기 통보 및 계약관련 후속절차 이행 협조 요청(총무부)

❍ 향후 추진 일정

- 2020. 9. : 주민설명회 개최(중랑구, 노원구)

- 2020.10. : 자문회의(노선 선정 및 특정제품 선정 심의)

- 2020.11. : 공공디자인심의, 공사중 교통소통대책 자문, 설계VE

- 2020.12. : 건설기술 심의

- 2020.12. : 용역 준공

붙임 : 1. 과업기간 부족에 따른 준공기한 연기 요청공문 1부

2. 용역연기 요청서 및 변경 예정공정표 1부.   끝.