투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	월드컵공원 축구장 건설 타당성조사 및 기본설계 용역 준공기한 연장

공원운영과-11535(2020. 09. 07.)호와 관련 월드컵공원 축구장 건설 타당성조사 및 기본설계 준공기한을 아래와 같이 연장하고자 합니다.

1. 용 역 명 : 월드컵공원 축구장 건설 타당성조사 및 기본설계 용역

2. 용역업체 : ㈜삼우씨엠건축사사무소 *** (서울 송파구 백제고분로 69(잠실동))

3. 계약금액 : 금42,854,020원(금사천이백팔십오만사천이십원정)

4. 용역기간 :‘19. 11. 13. ~‘20. 09. 12.

5. 계약변경 사항

구 분	당 초	변 경	증 감
용역기간	’19.11.13. ~ ’20.09.12.	’19.11.13. ~ ’20.12.01.	80일 연장

- 연기사유 귀책소재 : 서부공원녹지사업소

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

6. 공기연장사유 : 코로나19에 따른 공청회 지연 및 다양한 추가의견 수렴을 위한 2차공청회 개최

7. 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인환경생태테마공원육성, 산하공원운영,   월드컵공원시설물보수정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 검토보고서 1부.

2. 연기의뢰서 1부.  끝.

녹지조경팀장	고봉채		공원운영과장	최석환		서부공원녹지사업소장	09/07 남길순
협조자	재무팀장	김극남
시행	공원운영과-11570	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)