투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계용역 준공기한 연기 의뢰(도시고속도로 연결로(화랑로 진출)설치 보완설계)

1. 서울특별시 도시기반시설본부 토목부-17108호(2020. 9. 4.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계 용역

2) 용역규모 : 폭 5.0m, 연결램프 1,479m (교량 779m)

- 진출램프(북부간선도로→화랑로) 폭 5.0m, 연장 838.5m

- 진입램프(화랑로→북부간선도로) 폭5.9m, 연장 640.8m

3) 계약기간 : 2020.01.16.~2020. 9.15.

4) 용 역 비 : 680,400,000원

5) 계 약 자 : ㈜천일, ㈜동명기술공단종합건축사사무소, ㈜동희이앤씨, 씨지이앤씨㈜

나. 준공기한 연기 : 96일

1) 계약기간 : 당초 '20.01.16.~'20. 9.15.⇒ 변경 '20.01.16.~'20.12.20.

2) 귀책소재 : 서울특별시

3) 지체상금 : 미 부 과

4) 연기사유 : 붙임 참조

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.   끝.

	토목부장
주무관	박희정		토목설계과장	김동현		토목부장	09/07 김용제
협조자	주무관	김미경		간선도로계획팀장	김경호		재무예산과장	홍은미
시행	토목부-17255	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2586	/전송	02-3708-2599	/	parkoran@seoul.go.kr	/	부분공개(5)