투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(장월교 개축공사 실시설계용역)

1. 시설보수과-7183(2020.9.7.)호 『장월교 개축공사 실시설계용역』 설계변경 시행과 관련입니다.

2. 아래와 같이 『장월교 개축공사 실시설계용역』에 대해 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 장월교 개축공사 실시설계용역

나. 용역기간 : 2020. 3. 16. ~ 2020. 9. 11.

다. 용 역 비 : 금175,681,000원

라. 용역개요 : 장월교 개축공사 실시설계 1식

마. 계 약 자 : ㈜동해종합기술공사 대표자 정점래

바. 변경사유 : 추가과업 수행 및 사전절차 이행에 따른 과업기간 부족

사. 변경내용

- 금액변경

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
용 역 비	175,681,000	198,681,000	증)23,000,000

- 준공기한 연기(90일)

․ 당초 : 2020. 3. 16. ~ 2020. 9. 11.  ․ 변경: 2020. 3. 16. ~ 2020. 12. 10.

․ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

․ 지체상금 부과여부 : 미부과

아. 예산과목 :

- 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 장월교 개축공사, 시설비 및 부대비, 시설비.

[NO.1, 199,210,000원]

- 도로시설과, 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널,복개,지하차도,세척) 일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비. [NO.26, 23,000,000원]

붙임 : 관련서류 일체 1부.  끝.

	시설보수과장
주무관	오광준		시설보수과장	09/07 오재섭
협조자
시행	시설보수과-7189	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5450	/전송	02-945-5073	/	okwjun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)