코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 변경계약 의뢰

1. 공공개발기획단-8930호(2020. 9. 3.)와 관련입니다.

2. 우리 단에서 추진중인 공공기관 이적지 활용 기본계획 수립 용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 공공기관 이적지 활용 기본계획 수립

나. 계 약 자 : ********************

**************************************

다. 용역기간

- 기존 : 2019. 10. 31. ~ 2020. 10. 30.

- 변경 : 2019. 10. 31. ~ 2020. 12. 31.

라. 계약금액

- 기존 : (총차)금276,000,000원

- 변경 : (총차)금300,482,000원(증24,482,000원)

마. 변경사유 : *****************************

바. 예산과목 : 도시개발의 공공성 강화, 도시발전 및 공공개발, 공공기관 이적지 활용방안 수립, 시설비

첨부   1. 용역 설계변경 방침 1부.

2. 변경설계내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 과업내용서(변경) 1부.

5. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	공공개발기획단장
주무관	최희영		복합개발팀장	이덕노		공공개발추진반장	09/08 이상면
협조자	계약1팀장	원종순
시행	공공개발기획단-9033	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)