문서번호	교량안전과-13338
결재일자	2020.9.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량기획팀장	교량안전과장
김용태		박동욱	09/09 하현석
협조
	예산4팀장		천세은

「중차량노선 시설물 성능개선(개봉고가)」

예산변경(통계목) 검토 보고

2020. 9.

안전총괄실

(교량안전과)

「중차량노선 시설물 성능개선(개봉고가)」

예산변경(통계목) 검토 보고

「중차량노선 시설물 성능개선」사업으로 시행중인 “개봉고가 성능개선공사”와 관련하여, 공사시행기관(도기본)으로부터 부족 감리비 확보 요청이 있어 예산변경 내용을 검토 보고 드림.

1		관련근거

□ 예산조정 요청[토목부-17253(2020.9.7.)]

○ 예산 통계목 변경 검토 보고[토목부-17158호(2020.9.4.)]

2		공사개요

□ 사 업 명 : 중차량노선 시설물 성능개선(개봉고가 성능개선)

□ 위    치 : 개봉고가차도(구로구 개봉동 68~124)

□ 규    모 : 교량 성능개선(DB18→24), 폭 18.9m, 연장 332m

□ 기    간 : ‘19.8.12. ~ ‘23.4.11.

□ 총사업비 : 22,662백만원

3		보고내용

□ 건설사업관리기술인 투입인원 조정 필요에 따른 감리비 부족

○ 상주 건설사업관리기술인 출퇴근 7·4제 시행, 주야간 공사 진행에 따른 건설사업관리기술인 추가투입 필요로 확보 감리비 예산 부족

- 안전사고 재발방지 위한 감리원 출퇴근 7·4제 시행에 따른 감리원 보강 필요

- 철도시설공단에서 행위신고 승인조건 이행 요구(주간 감리원 배치 요구)

‣ 부족 감리비 : 1,011,000천원

4		검토의견

□ 현장 실정에 맞추어 건설사업기술관리인 투입인원을 조정하는 사항으로 감리비 확보를 위해 예산 변경 필요

※ 개봉철도고가 및 개봉고가 통합 발주에 따른 감리 용역 진행중으로 전체 감리비 (4,515,390천원)는 변동 없음.

5		조치계획

□ 원활한 사업 추진을 위한 부족 감리비 확보를 위해 ‘20년 예산의 통계목을 변경하여 재배정하고자 함.

○ 예산변경 계획

- 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 중차량노선시설물 성능개선, 시설비 및 부대비, 시설비/감리비

- 변경내역                                             (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
합 계	3,750,000	3,750,000	-
시 설 비	3,500,000	2,489,000	△1,011,000
감 리 비	250,000	1,261,000	1,011,000

※ 예산변경 : 동일 단위사업내 세부사업간 또는 동일 세부사업내 편성목(통계목)간 예산을 상호 융통‧사용

붙임  1. 예산 변경 요청 공문 1부.

2. 예산 변경 검토 보고서(도기본 ) 1부.  끝.