	은평소방서
수신	(주)산성건축사무소(서울시 서대문구 북가좌동 333-2)
(경유)
제목	녹번·역촌119안전센터 환경개선공사 설계변경 검토 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사중 현장여건 및 사용 직원들의 요청사항 발생으로 붙임과 같이 설계를 변경하고자 하오니 검토 후 의견을 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사(건축, 설비)

나. 공사기간 : 2020. 7. 31. ~ 9. 27.

다. 설계변경 개요                                           ※부가세 별도

공 종	구 분	당초(①)	변경(②)	증감(②-①)	비 고
녹번119 안전센터	창호공사 수장공사 도장공사 철거공사 기타공사	117,920,716	124,053,998	6,133,282	집계표 참고
역촌119 안전센터	타일공사 창호공사 수장공사 철거공사 기타공사	78,343,770	94,290,389	15,946,619	집계표 참고

라. 검토사항 : 설계변경 타당성 여부 및 금액 정산(증·감) 적정성 여부 등

붙임   1. 설계 변경 검토의견서(서식) 1부.

2. 설계변경 내역서 및 변경 도면 각 1부.  끝.

	은평소방서장
★장비회계팀장	임지혜		소방행정과장	전결 09/09 이대우
협조자
시행	소방행정과-9308	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6020	/전송	02-6981-6018	/	jhlim119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)