더 가까운 이웃 더 편안한 동네, 행복성북
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	성북천 분수마루 정비공사 설계변경(정산) 시행

우리 구에서 시행 중인 「성북천 분수마루 정비공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 성북천 분수마루 정비공사

2. 공사기간 : 2020. 5. 25. ~ 2020. 9. 10.

3. 도 급 자 : 태흥개발(주) 대표 신현종

4. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감		비 고
총 공사비		427,036,230	469,016,560	증)	41,980,330
도급비	공급가액	340,649,091	352,400,000	증)	11,750,909
	부가치세	34,064,909	35,240,000	증)	1,175,091
	계	374,714,000	387,640,000	증)	12,926,000
관 급 비		29,592,230	38,357,090	증)	14,764,860
이 전 비		18,100,000	31,249,470	증)	13,149,470
폐 기 물		10,630,000	11,770,000	증)	1,140,000

5. 설계변경 사유 : 붙임문서 참조

6. 예산과목

- 치수 및 하천관리, 하천복원 및 정비, 성북천(성북구) 한성대역 앞 분수광장 정비, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부

4. 설계변경(정산) 보고서 1부.  끝.

주무관							지영호				치수담당					김재준					치수과장					김윤기					건설교통국장						09/09 서형석
협조자				계약담당							정영임					재무과장							이계선
시행			치수과-15924										(						)		접수												(						)
우	02848					서울특별시 성북구 보문로 168 성북구청 치수과 (삼선동5가)																/			http://www.sb.go.kr
전화		02-2241-3623							/전송								/	kkk147@sb.go.kr													/	대시민공개