문서번호	한양도성도감-9123
결재일자	2020.9.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
김효섭		이원재	09/08 안중호
협 조

북한산성 회곽로 및 담쟁이 등 정비공사 및 감리용역

준공기한 연장 검토 보고

2020. 9.

문 화 본 부

한양도성도감

	북한산성 회곽로 및 담쟁이 등 정비공사 및 감리용역 준공기한 연장 검토 보고

「북한산성 회곽로 및 담쟁이 등 정비공사」 추진과 관련하여 시공방법 변경에 따른 설계변경 및 장기간의 집중호우장마·태풍 등에 인한 공기 지연으로 인하여 공사 및 감리용역 준공 기한을 연장하고자 함

Ⅰ		사업개요

․

□ 건    명: 북한산성 회곽로 및 담쟁이 등 정비공사 및 감리용역

□ 위    치: 북한산성 일대

□ 사업기간: (공사) 2020.5.27. ~ 20.9.23.

(감리) 2020.5.15. ~ 20.9.11.

□ 계약금액: ************************************

□ 계 약 자: ******************************

□ 공사내용: 북한산성 일대 회곽로, 담쟁이, 동장대 등 보수·정비

Ⅱ		변경내용

□ 변경내역: 공사 및 감리용역 준공기한 변경(연장)

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기한	2020.9.23.	***********	******
감리기한	2020.9.11.	**********	******

□ 변경사유 및 검토의견

-「북한산성 회곽로 및 담쟁이 등 정비공사」와 관련 시공방법 변경에 따른 설계변경(별도 방침수립) 및 장기간의 장마·집중호우·태풍 등의 영향에 따른 공기 지연으로 공사 및 감리기한 조정이 필요하므로, 안전사고 예방 및 현장 실정을 감안하여 공사 기간을 연장하고자 함.

붙 임: 공사 및 감리용역 준공기한 연기 의뢰서 및 합의각서 각 1부.  끝.