투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	계약변경 의뢰(동북권 세대융합형 복합시설 건립 기계공사 2차 및 총차)

우리 본부에서 시행중인「동북권 세대융합형 복합시설 건립 기계공사」에 대하여 다음과 같이 계약금액 조정을 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 동북권 세대융합형 복합시설 건립 기계공사
나. 계 약 자: 지에스네오텍(주)
다. 변경내용:

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
계약금액 [단위: 원]	총차	4,328,665,000	4,867,856,000	증 539,191,000
	2차	4,164,665,000	4,703,856,000	증 539,191,000
공사기간	총차	`18.10.15.~`20.09.28.	`18.10.15.~`20.10.24.	증 26일
	2차	`19.08.01.~`20.09.28.	`19.08.01.~`20.10.24.	증 26일

라. 계약금액 조정사유: 현장여건 반영 및 물가변동 등

마. 예산과목: 도시기반시설본부 설비부, 도시경제기반형 활성화계획 추진, 도시재생 계획수립(도시개발), 동북권창업센터 건립, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 계약금액 조정 보고서 1부.
2. 합의각서 1부.
3. 총차 및 2차 변경내역서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	박성수		시책사업과장	이종근		설비부장	09/09 이달영
협조자	재무예산과장	홍은미
시행	설비부-13500	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)