“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	암사아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰(암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사)

우리센터에서 시행하는“암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사”건에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

가. 건    명 : 암사 제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체공사

나. 사업개요 : 버터플라이밸브 및 신축관(D800mm) 각 4대 교체

다. 공사기간 - 당초 : 2020. 8. 20. ∼ 2020. 9. 13. ⇒ 변경 : 2020. 8. 20. ∼ 2020. 9. 25.

라. ********************

마. *************************

바. 연기사유 : 여과지 휴지시간 단축을 위한 순차적 교체로 공사기간 추가 소요

사. 지체상금 : 미부과

아. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비(시설비), 정수장시설정비(11101) - 2정수장 여과지 퇴수밸브 교체

붙임 : 1) 납품기한 연기 검토보고서 1부

2) 합의서 1부.  끝.

	정수시설과장
주무관	조광호		정수시설과장	09/09 전훈
협조자
시행	정수시설과-9501	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 (암사동)	/
전화	02-3146-5772	/전송	02-3146-5707	/	lovetou77@seoul.go.kr	/	부분공개(5)