문서번호	원수관리과-1214
결재일자	2020.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이승수		최양교	09/09 신동호
협 조
	주무관			김금옥

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

기계설비 보수공사(장기계속계약)

1차 설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 08.

기계설비 보수공사(장기계속계약)-취수장

1차 설계변경 시행 보고

통합취수장 기계설비 효율적인 유지관리를 위한 보수공사(장기계속계약) 시행 중 신규 공종 및 추가사항 발생 건에 대해 아래와 같이 설계변경 시행하고 정산코자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 2020년도 강북아리수정수센터 기계설비 보수공사(장기계속계약)

◯ 사업기간 : 총차 2020. 4. 1 ~ 2021. 3. 31

(금차 2020. 4. 1 ~ 2020. 08. 31)

◯ 계약금액 : 총차 금41,293,130원(금차 금36,926,130원)

◯ 계 약 자 : 선제이앤씨 주식회사   대표 : 전 면 식

◯ 정비공사 계약 내역

- 모터펌프 및 배수펌프 수리 1식

- 배관재 보수 및 밸브류 정비 1식

- 취수장 내 기타 기계설비 정비 1식 등

□ 작업지시 현황

◯ 1차 작업지시(2020. 5. 18)

- 강북계열 염소저장실 운반용 호이스트 와이어 교체 외 5건

※ 세부 작업지시내용은 첨부 작업지시서 참조

Ⅱ		설계변경 사항

○ 주요 공종 추가 내역

공 종	재료비	노무비	경비	계	작업지시
1. 염소통 운반용 호이스트(2톤) 구동 와이어 교체	236,250	525,000		761,250	1차
2. 저수조 정수위밸브 신규설치	8,079,728	2,180,768		10,260,496
3. 구의 정수위 밸브 교체	3,309,327	88,375		3,397,702
4. 진공탱크 재설치 및 진공라인 정비	340,885	1,683,821		2,024,706
5. 집수정 진입계단(sts)제작설치 외	2,340,625	656,250		2,996,875

○ 세부공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	70,219	14,306,815	증)14,236,596
	노무비	22,729,485	11,514,917	감)11,214,568
	경 비	1,322,382	1,497,660	증)175,278
	소 계	24,122,086	27,319,392	증)1,236,095
일반관리비		1,672,964	1,769,612	증)96,648
이 윤		4,013,503	2,306,061	감)1,707,442
고재처리비용		0	0	-
총원가		33,569,209	33,569,209	-
부가세		3,356,921	3,356,921	-
도급비		36,926,130	36,926,130	-

○ 총괄변경 내용

- 계약금액 변경사항 : 변동사항 없음

- 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	33,569,209	33,569,209
부가가치세	3,356,921	3,356,921
도급금액	36,926,130	36,926,130
결정금액	36,926,130	36,926,130

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자 하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함

□ 설계변경 후 작업 완료한 사항에 대해서는 정산 및 대가(기성집행)지급 하고자 하며

□ 예상치 못한 기계고장 등 필요에 의한 물량증설 발생할 경우, 1,2차 계약금액 범위내에 유지보수 추진

붙  임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 작업지시서(1차 ) 1부.

3. 검증 확인서 1부.  끝.