문서번호	생태환경과-3093
결재일자	2020.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
장창수		이정환	09/10 김인숙
협조
	주무관		박웅교

- 광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업 - 공사현장 실정보고(조경)에 대한 검토보고

2020. 9

생태환경과

- 광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업 -

공사현장 실정보고(조경)에 대한 검토보고

한강의 자연성을 회복하기 위하여 시행중인「광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업」과 관련하여 서울시설공단의 공사현장 실정보고(조경)에 대하여 아래와 같이 검토하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

▢ 공사개요

○ 공 사 명 : 광나루한강공원 자연(형)호안 복원사업

○ 공사기간 : 2019. 10. 18 ~ 2020. 12. 28

○ 공사내용 : 자연형 호안 복원, 수변식생대 개선, 수목식재 등

○ 도 급 비 : 2,722,370천원(토목 : 1,636,870천원, 조경 : 1,085,500천원)

○ 도 급 자 : 주계약자 공동도급

┍ 주계약자(토목) : 동암건설산업(주) 대표 김성수

┗ 부계약자(조경) : (주)지석조경건설 대표 박영원

○ 공사감독 : 서울시설공단(공사감독3처)

▢ 실정보고 및 승인여부

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
시설물공	○ 나들목에서 한강공원 진입구간 안전한 이용을 위하여 판석포장 및 조경석계단 설치 필요	○ 나들목에서 한강공원 진입구간 판석포장 및 조경석계단 설치 반영 - 현무암판석(부정형. T50) : 0 → 37.1㎡ - 조경석계단(유용석쌓기) : 0 → 1식	승 인
식 재 공	○ 쾌적한 이용환경 제공을 위해 홍수 피해로 훼손된 잔디 재식재 필요	○ 공원이용자가 많은 진입부 및 산책로로 이용되는 일부구간 재식재 - 잔디떼붙임(0.3×0.3) : 13,430 → 17,250㎡	숭 인

구 분	실정보고 내용	검토결과	비 고
식 재 공	○ 현장여건을 고려하여 일부 수종의 식재 및 이식 수량 조정 필요	○ 일부 수종의 식재, 이식 수량 조정 - 흰말채(H1.0xW0.4) : 3,150 → 3,550주 - 교목이식(R20) : 6 → 7주 - 교목이식(R25) : 5 → 6주 - 교목이식(R30) : 17 → 18주	승 인
수해복구	○ 수위상승에 띠른 현장침수로 수목전도, 고사목 및 부유물, 퇴적토 등 긴급복구	○ 실투입 인원 및 장비사용료 반영 - 수해복구비 : 0 → 1식	승 인

▢ 개략공사비

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 감	비 고
도 급 비	*****	*********	*********	********
	****	*******	*********	********
	*****	******	*******	*******

○ 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경 개선, 한강 자연성 회복, 자연(형) 호안 복원, 시설비 및 부대비, 시설비

▢ 보고자 검토의견

○ **************************************************************.

붙임 : 1. 공사현장 실정보고 승인요청 공문 1부.

2. 공사현장 실정보고 검토내용(서울시설공단) 1부.

3. 수해복구 관련 자료 1부.

4. 계략공사비 내역서 1부.  끝.