투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축) 설계변경 시행(수정)

1. 시설과-1925호(2020. 9. 9.)관련입니다.

2.『선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축)』설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 선유도공원 유리온실 리모델링공사(건축)

나. 공사기간 : 2019. 11. 25. ~ 2020. 9. 11.

다. 공사개요 : 연면적 350.6㎡, 높이 6.67m 유리온실 리모델링

라. 계 약 자 : 륜덕종합건설 대표 이강태

마. 계약금액 : 금247,161,000원

바. 설계변경 내용

구 분		당 초	변 경	증 · 감
도급비	공 급 가 액	금224,691,819원	금215,036,364원	(감)9,655,455
	부가가치세	금22,469,181원	금21,503,636원	(감)965,545
	계	금247,161,000원	금236,540,000원	(감)10,621,000

사. 예산과목 : 생활주변 녹지확충, 시민참여 녹지조성, 화분나누기 행복더하기, 시설비및부대비, 시설비 (예산편성부서: 푸른도시국 조경과)

아. 변경사유 : 공사물량 정산에 따른 공사비 변경 발생

첨 부 : 1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경내역서 1부

3. 검증확인서 1부.  끝.

주무관	이석중		주무관	박선미		시설과장	문인기		서부공원녹지사업소장	09/10 남길순
협조자	재무팀장	김극남
시행	시설과-1932	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60 (성산동) 서부공원녹지사업소	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화	02-300-5568	/전송	02-300-5569	/		/	대시민공개