설계변경 심의 의견서

대시민공개

1. 공사명 : 2020년 강북취수장 전기설비 보수공사

(연간단가)

신청부서명	원수관리과
작 성 자	도보선
제출년월일	2020. 09. 11

2. 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2020. 09. 10(목) 10:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여

아래와 같이 의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위    원

원수관리과장

최양교

09/11

최양교

타당함

위    원

주무관

김종필

김종필

타당함

위    원

주무관

정정재

정정재

타당함

위    원

주무관

이종팔

이종팔

타당함

위    원

주무관

김기철

김기철

타당함

담    당

주무관

도보선

도보선

타당함

ㅈ

설계변경 사유서

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 강북취수장 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2020.4.13. ~ 2021.3.31.

○ 계약금액 : 금68,408,260원

○ 계 약 자 : 대선전공 대표 송 영 탁

□ 설계변경 주요내용 및 사유

○ 설계변경 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령

제74조

○ 변경사유 : 1차 계약기간 중 신규공종 발생 및 계약물량 변경

○ 주요 변경내용

【계약물량 변경 사항】

- 설계변경 금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증․감
계약공사 금액	68,408,260	68,408,260	-

- 계약물량 변경 (상세내역 변경내역서 참조)

구 분		공 종	비 고
공종	물량감소	접지봉(φ16×1800L)설치 등 204건
	물량증가	F-GV(6㎟) 전선포설 등 14건

- 주요 신규공정 내역

연번	주 요 변 경 내 역	수량	단위	비 고
1	제어케이블 철거(2C×2.5㎟)	3142	M
2	화면분배기 철거	6	개
3	제어전송기 철거	4	개
4	광케이블 설치	240	M

□ 심의사항

○ 신규공종 적정성 여부

○ 물량 증·감 적정성 여부

○ 단가적용 적정성 여부

○ 제비율 산정 및 요율의 적정성 여부 등

붙 임 : 1. 설계변경 내역서  1부. 끝.