문서번호	소방행정과-9420
결재일자	2020. 9. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
차영진	임지혜	이대우		09/11 이창식
협 조

낙찰차액 사용 설계변경 시행 보고

녹번·역촌119안전센터 환경개선공사

2020.9

은평소방서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 -

낙찰차액 사용 설계변경 시행 보고

녹번·역촌119안전센터 환경개선사업 공사중 발생한 현장여건 상이 및 사용 직원 요청사항에 대하여 낙찰차액 사용 설계변경 시행으로 공사 효율성 증진 및 직원 복지 향상을 도모하고자 함

	1		관련근거

○ 소방행정과-7717(2020.7.28)호「녹번·역촌119안전센터 환경개선

공사 계약 체결 보고」

○ 소방행정과-9226(2020.9.7.)호 「녹번·역촌119안전센터 환경개선

공사 추가 요구사항 검토 결과」

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제114호)

제13장 공사계약 일반조건, 제6절 공사 설계의 변경

	2		사업개요

○ 사 업 명 :  녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사

○ 공사업체 : ㈜마로건설(대표자 주수진, 마포구 마포대로 12)

○ 공사기간 : 2020. 7. 30. ~ 9. 27.

○ 공사금액 : 262,012,720원 (낙찰율 88.319 %)

○ 진 행 율 : 65%

	3		설계변경 보고

○ 설계변경 사유

- 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우에 해당

- 예산부족으로 설계에 미반영된 부분을 설계변경함으로써 노후화된

청사환경 개선 및 공사효율성 증대(잦은 공사로 초래되는 불편함 방지)

- 여름철 폭우로 인한 천장 누수 발생(녹번)으로 신속한 선행조치

(천장 보수) 필요성

○ 설계변경 내용 요약(붙임1 참조)

녹 번	역 촌
○ 1층 대기실(체력단련실)임시 가설칸막이 ○ 1층 대기실 기존 창호 철거 및 내벽신설 ○ 2층 계단실, 구 팀장실 등 천장 누수 지붕 보수 ○ 창호공사 - 2층 출입구, 식당(자동문) 및 체력단련실 출입문 확대 - 주방 식당 창고 신설 및 미서기문 신설 - 1층 대기실 출입문 신설 ○ 수장공사 - 2층 내력보강 벽체 띠장 설치, 체력단련실 MDF 설치 - (구)팀장실 내부 인테리어, 대기실 칸막이벽 - 2층 천정 텍스 일부 교체 ○ 휴게실, 체력단련실, 주방, (구)팀장실, 계단실 페인트 마감 ○ 체력단련실 벽면 2명+기둥3면 거울 설치	○ 2층 식당 바닥 비닐시트→타일 변경 ○ 1·2층 9개소 단창을 이중창으로 교체 ○ 1층 휴게실 벽체 1면 편백 조성 ○ 1·2층 기존 문틀 철거 및 신설 교체 ○ 2층 체력단련실 전면 거울 설치
증) 6,133,282원	증) 15,946,619원

○ 설계변경 타당성 검토 결과(주.산성건축사무소)

- 설계변경 내용이 수량 및 적용단가가 적정하고 변경사유 또한 현장

여건에 부합됨.

○ 낙찰차액 등 잔액 현항

- 잔     액 : 31,961천원        ※ 본 예산 : 323,954천원

· 낙찰차액 : 29,777천원

· 집행잔액 :   2,184천원

	4		조치계획

○ 낙찰차액 활용, 진행중 공사를 설계변경하여 시행

- 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
공사금액	262,012,720원	290,970,410원	증)28,957,690원	원단위절사
공사기간	2020.7.30.~9.27	-	-

○ 합의각서 작성 및 변경계약 체결

붙 임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 변경도면 1부.

3. 설계사 검토의견서 1부.  끝.