(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

서부간선 지하도로 민간투자사업 건설사업(조경)-2공구

공사개요

· 위    치 : 서부간선(철산교~금천IC)종점부

· 규    모 : 폭4차로, 도로연장5.136km

- 터널3.8km, 개착박스(430m, 폭4차로)

· 공사기간 : ‘16.03~’21.08.

· 사 업 비 : 2,256억원(조경 8억원)

· 시공사 : GS건설(주)

· 감리단 : ㈜제일엔지니어링 외 4

· 설계사 : ㈜유신

실정보고 건명

제방변 지장수목 정비 및 식수대 철거에 따른 신규식재 실정보고

(서서울도시고속도로-367호(20.09.04), 서부2감-619호(20.09.04.))

실정보고 사유

① 종점부(금천교 주변) 개착구간 제방변 지장수목 정비 승인 및 금천구 요구사항

반영에 따른 변경

(금천구 공원녹지과-12826호(19.07.12.)/15671호(19.08.28.))

② 종점부 방음벽 철거 및 재설치(독산동 704-3일대)에 따른 벽면녹화 식수대 철거및 원상복구(대체식재)에 따른 변경

(서울시설공단, 도로환경처-4097호(20.06.22.))

건설사업관리단

검토의견

서부간선 지하도로 종점부 개착구간의 안양천 제방변 지장수목 정비 및 방음벽 재설치로 벽면녹화 식수대 철거에 따른 신규(대체)식재 계획에 대한 실정보고 건으로, 해당 수목의 관리부서 요구사항 반영 및 현장여건을 고려한 정비계획이 적정한 것으로 판단됨

공기에 미치는 영향

해당없음

변경(안)

수량 변경

	구 분		단 위	수 량			비 고
				당 초	변 경	증·감(△)
제방변 수목정비	제거		주	64	26	△38
	이식		주	19	42	23
	신규식재 (왕벚나무)	B15	주	143	0	△143
		B18	주	0	126	126
식수대철거 및 신규식재	능소화(R4)		주	-	210	210
	원추리		본	-	5,940	5,940
	목재(철거)		EA	-	336	336	이동(운반)

예산 변경

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감(△)	비 고
제방변 수목정비	117,161	168,201	51,040
식수대 정비	-	39,559	39,559	철거 및 대체식재
간접공사비	23,940	49,044	25,104
합 계	141,101	256,805	115,703
공사비조정(84.37%)	-22,054	-40,138	-18,084	‘07.07불변
낙찰율적용(84.0%)	-19,047	-34,666	-15,619
계(불변가기준)	100,000	182,000	82,000

예산조치 계획	당초 도급비 범위내 시행가능 ( ) 당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ ) 별도(추가) 예산 확보 필요 ( )
추가 행정절차 이행 필요여부	해당없음(승인 통보 후 설계변경 시행)
발주처 검토의견	- 지하도로 종점부 개착구간 제방변 수목 정비 및 방음벽 철거로 인한 대체식재를 위한 현장여건 고려 및 관리부서와의 협의결과를 적정하게 검토한 것으로 판단되어 실정보고 승인 처리하고, 원활한 공정추진을 위해 우선 공사시행하고 향후 설계변경 반영함. - ‘서부간선지하도로 민간투자사업 실시협약’ 제13조(총사업비의 변경) ③항 규정에 의거 증감되는 공사비는 최종 합산하여 실시협약에서 정한 공사비 범위 내에서 조정하여 설계변경시 반영(공사비 조정 84.37%, 낙찰율 84.0% 적용).
비 고	붙임: 실정보고 승인 요청 공문 1부. 끝.
결재	주무관	김시내	공원시설과장	이병호	방재시설부장	09/14 박홍봉