문서번호	시설관리과-16290
보존기간	년
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	시설안전팀장	시설관리과장
강철운	권영안	09/14 김홍준
협 조
	급수운영팀장		김찬모
	급수관리팀장		김승완
	주무관		황순미

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

[2020년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약) ]

2020. 9.

시설관리과

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2020년 은평구 관내 상수도공사 (장기계속단가계약)

나. 공사기간 : 2020. 6. 4. ~ 2021. 6. 30.

다. 총도급비 : 금921,742,980원(금구억이천백칠십사만이천구백팔십원)

라. 공사개요

- 당초 : D=15mm ~ 300mm, L=1,534m

- 변경 : D=15mm ~ 300mm, L=1,736m

마. 도 급 자 : ***********

2. 보 고 내 용

가. 설계변경 사유

1) 2020년 각 공사별 예정물량의 증·감 및 신규공종에 따른 설계변경

- 신규공종 : 아스팔트포장깨기(굴삭기 0.4㎥, 지세할증) 외53개 공종

- 물량증감 : 벽체계량기 설치공 외 57개 공종

2) 공사비 변경내용

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	주요공종
토 공	187,056,670	161,189,497	감 25,867,173	아스팔트포장깨기 등
부 설 공	165,067,971	171,441,996	증 6,374,025	스텐관부설공 (D=50mm)등
구조물공	20,292,287	20,912,123	증 619,836	대형계량기실 설치공 등
부 대 공	79,534,114	92,920,095	증 13,385,981	안전칸막이휀스 설치 및 철거 등
사급자재비	98,582,688	107,597,427	증 9,014,739	스텐레스관 (13mm) 등
부가세 및 요율	371,209,250	367,681,842	감 8,811,734
합 계	921,742,980	921,742,980	변동없음

2) 총공사비 변경내용 (변동없음)

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	비고(증․감)
합 계		921,742,980	921,742,980	-
도급비	계	921,742,980	921,742,980	-
	공급가액	837,948,164	837,948,164	-
	부 가 세	83,794,816	83,794,816	-
기타 및 복구비		-	-	-

3. 조 치 의 견

위와 같이 신규공종 및 시공물량 증․감으로 인한 설계 변경된 사항를 자체 심의한 결과에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경을 시행하고 행정지원과에 변경 계약 의뢰하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경심의위원회 개최 1부.

2. 설계변경요약서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 심의결과서 1부.  끝.