문서번호	설비부-13770
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시책사업과장
손영화		09/14 이종근
협 조
	주무관		박희준

『동부간선도로 확장(3공구) 전기공사』

설계변경 소위원회 심의요청

2020. 9.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		설비부 담당 손영화	요청일		2020년 09 월 일
공 사 명	동부간선도로 확장 3공구 전기공사
공사개요	공사규모		방음터널 (L:1,365M) 전기공사 -1식 장암지하차도 전기설비 - 1식 상도지하차도 전기설비 – 1식/ 가로등 설비 -1식
	공사기간		2008. 06. 26. ~ 2020. 12. 31.
	감 리 사		동부엔지니어링(주), (주)한국건설관리공사
	설 계 사		은세기술(주), (주)서우티이씨
	시 공 사		(주)정등전력
자문 안건명			1. 방음터널 전기실(2개소) 위치변경 2. 수락고가 및 종점부 우회도로 가로등 이설공사 3. 피난구 유도등 및 소화기 표시등 설치 4. 방음터널내 임시투광기 69개소 설치			요청금액		증 147,229천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ▢ 유지관리, 사용부서 요구 ▢ 설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 사전협의 미흡 ☑ 기타(유관기관 요청사항)
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 1. 방음터널 전기실(2개소) 위치변경에 의한 케이블등 규격 변경 및 물량 증, 감 : 2. 가로등 철거 29개소, 이설 21개소, 신설 4개소 : 3. 터널 피난구 유도등 5개소, 소화기 표시등 20개소 신설 : 4. 방음터널내 임시투광기 69개소 설치 및 배관, 배선
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 1. 당초 수락고가 주위 녹지대에 전기실 시설 → 미관 및 소음등 민원발생을 해소하고자 수락고가 하부로 전기실 위치변경. 2. 당초 방음벽 시설에서 방음터널 시설로 변경됨으로써 공사시행을 위하여 차량의 원활한 흐름을 확보하기 위한 우회도로 신설에 따른 가로등 설비.. 3. 유관기관 요청에의한 방음터널내 피난출입문 신설 및 중앙차로 소화기 표시함의 시인성을 확보하기 위하여 소화기 표시등 추가 설치. 4. 방음벽 시설에서 방음터널 시설로 변경됨에 따라 기설 가로등 설비 철거 및 방음터널내 조명설비로 임시투광기 시설로 운전자의 시야를 확보하기 위함. ▪ 물량 증감내역 - 별첨					▪ 공사비 증감내역 당초 : 3,915,533천원 변경 : 4,062,762천원 증감 : 147,229천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 전력 인입 설비 - 동력 설비 - 조명 설비
별첨서류	5 1. 감리단 검토보고서 사본 1부. 2. 실정보고 사본 1부. 3. 변경설계내역서 1부. 1. 관련문서 1부.				▪공사예정시기 - 2020. 03. ~ 12.

□ 전체분 공사현황

계 약 명	동부간선도로 확장 3공구 전기공사
계약금액	3,915,532,900원	계약일	2008. 06. 26.	시공사	(주)정등전력
공사기간	2008. 06. 26. ~ 2020. 12. 31.	협의률		설계자	은세기술(주)/(주)서우티이씨
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	동부엔지니어링(주) (주)한국건설공사
공사규모	방음터널 (L:1,365M) 전기공사 -1식 장암지하차도, 상도지하차도 전기설비 -1식 가로등 설비 - 1식

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	1. 방음터널 전기실 옥외 녹지에 시설 2. 방음벽 시설 →방음터널 변경에의한 우회도로 신설 3. 피난출입문 없슴, 중앙차로 소화기함 양문시설 4. 방음벽 설비에 의한 가로등 설비		1. 방음터널 전기실 수락고가 하부에 시설 2 .우회도로 신설부 가로등 이설 및 신설 3.피난출입문 신설에의한 피난유도등 시설 소화기함 추가 시설 4. 방음터널 변경에 의한 터널내 임시 투광기 시설
공 사 비	3,915,533천원		4,062,762천원	증 147,229천원
적 용 요 율	낙찰률 86.746%		낙찰률 86.746%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의률 적용 근거	• 공사계약일반조건 제19조, 제20조 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제74조에 의거 계약금액 조정.도시기반시설본부-16-3051, 2016.04.21)
설계변경 근거	방 침	• 관련문서 참조 • 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[행정안전부 예규 제1호(2017.07.26.)]
	관련규정	• 제13장 공사계약일반조건 제6절 공사의 설계변경
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②민원해결, 보수, 보강 ③문화재 및 지장물 이설 ④ 현장여건 상이 ⑤ 유지관리, 사용부서 요구 ⑥설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ⑦공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑧제도, 기준변경 ⑨유관기관 사전협의 미흡 ⑩ 기타(유관기관 요청사항)
설계변경 내용	1. 방음터널 전기실 2개소 위치변경에 의한 전력인입설비, 동력설비, 조명설비, 자동제어설비등 관련자재 규격 변경 및 물량 증감에 따른 관련비목 변경 2. 방음벽시설에서 방음벽터널 변경 및 우회도로 신설에 따른 가로등 이설 및 신설 3. 방음터널내 피난출입문 신설 및 중앙차로 소화기함 양문설치에 따른 피난구 유도등 및 소화기 표시등 설계반영 4. 방음터널 설치에 의한 방음터널내 임시투광기(조명)시설 설계반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

1. 실정보고(방음터널 전기실 위치변경에 따른 전기설비공사) : 동부정등 2020-0622-1(2020.06.22)

2. 실정보고(옥외전기실위치이동) 조건부 승인 통보 : 동삼감 제2020-203(2020.07.15)

3. 조건부승인-업무연락전 (전기실위치변경 조건부 승인) : 도시기반시설본부-20-8491