문서번호	설비부-13797
결재일자	2020. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장
박근형	오삼록	09/15 이달영
협 조

서남물재생센터 태양광발전설비 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

서남물재생센터 태양광발전설비 설치 계획

‘20년 환경부 국비 추경 사업으로 선정된 서남물재생센터 침전지 상부를 활용한 태양광발전설비를 설치하여 온실가스를 감축 및 신재생에너지 보급 확대에 기여코자 함.

1		추진근거

□ ‘20년 공공시설 신재생에너지 보급사업 추진계획[녹색에너지과-2431(20.1.29.)]

□ 서남물재생센터 태양광설비 설치 공사시행 요청[녹색에너지과-23243(20.8.31.)]

2		사업개요

□ 사 업 명 : 서남물재생센터 태양광발전설비 설치

□ 위    치 : 서남물재생센터(서울시 강서구 양천로 201)

□ 규    모 : 태양광발전설비 600kW

□ 기    간 : 2020. 9. ~ 2021. 4.(7개월)

□ ********1,740백만원(국비 870백만원, 시비 870백만원)

3		추진계획

□ 설치장소 : 서남물재생센터 침전지 상부

위치도	평면도

□ 추진방법                                         (단위 : 천원)

구 분	내 용	예상금액	계약방법
시설비	태양광 발전설비 시설공사	1,639,000	제한경쟁입찰 (지역제한) 및 조달구매
용역비	실시설계 용 역	35,000	소액수의계약
	시공감리 용 역	55,000
	건축물 구조안전 진단용역	11,000

※ 설계 결과에 따라 사업 시행비(공사 및 감리용역)는 변경될 수 있음.

□ 예산과목 : 기후환경본부 녹색에너지과, 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지보급, 공공시설 신재생에너지 보급-환경기초시설, 시설비·감리비

4		향후계획

□ 기술용역타당성 심사 : 2020. 9.

□ 설계 및 구조안전진단 용역시행 : 2020. 9. ~ 12.

□ 공사시행 및 감리용역시행 : 2020. 12. ~ 21. 3.

□ 준공 및 시설물 인수인계(녹색에너지과) : 2021. 4.

붙임 서남물재생센터 태양광 발전설비 설치공사 의뢰 공문 1부.  끝.