“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 주간공정 보고(7주차)

1. 소방행정과-7944(2020.8.3.)호 『녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 착공 안내』와 관련입니다

2. 녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 주간 공정을 다음과 같이 보고합니다.

【주간공정】

1. 기  간 : 2019. 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금)

2. 공정율 : 65%

【금주 공정 세부사항】 (2020.9.7. ~ 9.11.)

1. 건축, 설비 ⇨ 마로건설(주) (마포구 마포대로12)

구 분	녹번119안전센터	역촌119안센터
작업 내용	○2층 바닥 데코타일 및 거울설치 ○2층 천장 누수관련 목공보수작업 ○2층 식당, 센터장실, 사무실, 대기실 페인트 작업	○2층 바닥 및 벽체 타일 작업 ○2층 설비공사, 환기구, 세탁실 수전설치 ○2층 탈의실, 세탁실, 식당 바닥 타일작업 ○식당 천장텍스 및 싱크대 설치작업 ○샤워실 철거작업

【차주 공정 예정사항】 (2020.9.14. ~ 18.)

1. 건축, 설비 ⇨ 마로건설(주) (마포구 마포대로12)

구 분	녹번119안전센터	역촌119안센터
작업 내용	○2층 마무리 작업 ○1층에서 2층 이사 ○1층 철거공사 ○1층 내부인테리어공사	○ 2층 주방 바닥 및 벽체 타일 설치 ○ 2층 샤워실 타일작업 ○ 2층 탈의실, 세탁실 마무리작업 ○ 1층 설비 작업 ○ 1층 천장텍스 교체작업

붙임 : 주간공정 보고서(7주차) 1부.   끝.

담당자	차영진		장비회계팀장	임지혜		소방행정과장	이대우		소방서장	09/15 代이대우
협조자
시행	소방행정과-9477	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)은평소방서 3층 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6021	/전송	02-359-7019	/		/	부분공개(7)