문서번호	급수운영과-21463
결재일자	2020. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	동부수도사업소장
박종대	권기섭	유동수	09/15 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020년 광진구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(제1회)

2020. 9.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 광진구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(제1회)

우리 사업소에서 시행하고 있는 「2020년 광진구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사」의  설계변경 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사현황

○ 공 사 명: 2020년 광진구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자: ****************

○ 도급금액: *************

○ 공사기간: 2020. 4. 20.~2021. 6. 30.

○ 공사개요: ************************************

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 산재·고용보험료등 제경비 변경 등

○ 설계변경 세부내역

- 변경 공사개요

구 분	단위	물량내역		증·감	비 고
		당 초	변 경
*********	**	***	***	***	****
***********	**	***	***	***	*

- 세부내용 및 금액 증·감 현황(붙임 설계변경 내역서 참조)

구 분	공종	명칭	증·감	비고
*****	**	********************	*************
*****	*	*******	************
*****	**	*************	**************
**	**	*********

○ 계약금액 변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
****	************	************	*

심의위원회 개최현황 및 결과

○ 개최일자: 2020. 9. 15.(화)

○ 개최장소: 금수운영과 사무실(3층)

○ 참석위원: ***********

○ 검토내용: 물량 증·감 등의 적성성 및 신규공종의 단가산출 검토

○ 검토결과: 변경내역에 대하여 적정의견 제시

향후 계획

설계변경 심의위원회 개최결과 변경내역에 대해 적정하다는 의견이 제시됨에 따라 제시된 내역으로 설계변경을 시행하고 행정지원과로 변경계약을 의뢰코자 함.

붙임  1. 설계변경 심의 의결서(제1회) 1부.

2. 설계변경 내역서(제1회) 1부. 끝.